문서번호	건축부-4774
결재일자	2020.3.17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		복지시설과장	건축부장
정호기		조영수	03/17 임인구
협조

「마곡산업단지 공공산업지원시설 건립공사」

3차공사 시행 검토보고

2020. 03.

도시기반시설본부

건 축 부

*********************

3차공사 시행 검토보고

「********************」와 관련 건설사업관리자로부터  3차공사 계약시행 요청이 있어 검토하고 보고함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : ********************

○ 총공사비(건축·토목·조경) : ************

*****************************************

○ 공사기간 : ‘18. 08. 01. ~ ‘21.05.31

(1차 : ~19.11.11, 2차 : 19.11.12~2020.12.31)

○ 시 공 자 : 주식회사 신성건설, 주식회사 엔씨종합건설

○ 건설사업관리용역업자 : ㈜토문엔지니어링건축사사무소 외 1개사

○ 추진경위

- ‘18. 8.  1 : 공사착공

- ‘19.11.11 : 1차수 공사준공

- ‘19.11.12 : 2차수 공사착수

- ‘20.03.16 : 현재공정률 46%(지하 2층 골조공사중)

□ 3차공사 시행 계획

○ 발주 계획

(단위: 원)

구 분		계약금액	공사기간	비 고
계약 금액	총 차	**************	***************************
	1차	5,236,000,000	***************************
	2차	4,534,805,231	***************************
	3차	**************	**************************	골조공사, 마감공사

○ 예산과목: *************************************************************************************************

□ 건설사업관리자 의견

○ 기계약된 1차수와 2차수의 계약량을 확인하여 잔여수량을 3차수 내역으로   산정하였으며, 검토한 결과 적합하다고 판단됨.

□ 처리의견

○ 원활한 공정진행을 위하여 건설사업관리기술자의 검토의견에 따라 3차수   공사계약을 추친코자 함.

붙임 : 1. 마곡산업단지 공공산업지원시설건립공사 3차수 계약요청 1부.

2. 3차 계약 내역서 1부. 끝.