문서번호	설비부-4027
결재일자	2020.3.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
양우창		여인웅	03/17 임정규
협조

[중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사]

약품저장탱크 납기연장 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 3.

도시기반시설본부

(설비부)

[중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사]

약품저장탱크 납기연장 검토보고

「중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업」약품저장탱크 납품기간 연장요청 건에 대한 검토보고임.

1		관련근거

□ 관급자재 납기연장 요청 검토보고: 중랑감 제20-126호(2020.3.13)

2		공사개요

□ 공 사 명: 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사

□ 공사규모: 하수처리시설 Q=828,000㎥/일

- 총인 412,000㎥/일(TP 0.13㎎/L)+비총인 416,000㎥/일(TP 0.18㎎/L) ⇒ 혼합방류(TP 0.46㎎/L)

□ 공사기간: 2017.11.20 〜 2021.1.26(시운전기간 포함)

□ 공 사 비: 2,398백만원

3		검토내용

□ 계약건명: 중랑물재생센터 총인처리시설 약품저장탱크 제조구매설치

□ 계약상대자: 화신에프알피산업 대표 박흥식

□ 계약현황

구분	총차	1차	2차
계약금액	591,340,420원	46,609,200원	544,731,220원
계약일자	2019.12.24	2019.12.24	2020.2.18
납품기한	2020.6.30	2020.3.31	2020.6.30
진행현황	승인도면 보완 및 탱크류 제작	승인도면 보완 및 탱크류 제작	승인도면 보완 및 탱크류 제작

□ 변경내용

구분	계약금액		납품기한
	당초	변경	당초	변경
1차	46,609,200원	변경없음.	2020.3.31	2020.6.30

□ 변경내용: 선행공정 지연에 따른 납품 및 설치 불가

□ 귀책소재: 도시기반시설본부

□ 지체상금 부과여부: 미부과

□ 건설사업관리단 검토의견

- 선행공정인 토목·건축공사의 지연으로 1차분 납품 및 설치가 어려운 실정임.

- 설치시기 미도래 상황에서 납품받아 보관시 기기 손상 등 품질저하가 우려되어 공사품질 확보를 위해 납품기한 연기조치가 필요함.

4		조치계획

□ 건설사업관리기술자 검토내용이 적정하다고 판단되어 현장여건에 맞게 약품저장탱크의 납품기간(1차)을 위와 같이 연장하고자 함.

붙임: 관급자재 납기연장 요청 검토보고(건설사업관리단) 1부  끝.