문서번호	기전설비과-940
결재일자	2020.3.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
성기학		최영조	03/17 전영주
협조
	주무관		이균형

서래섬 하이브리드가로등 구매 설치 검토 보고

2020. 2.

2020. 03.

기전설비과

서래섬 하이브리드가로등 구매 설치 검토 보고

한강공원 서래섬에 설치 예정인 하이브리드가로등 특정제품이 선정 완료되였기에 설치 수량 및 방법에 관한 검토 내용을 보고 드림

□ 사업 개요

❍ 수  량 : 하이브리드가로등 10대

❍ 규  격 : 등주 6M, LED 50W (축전지 100Ah 4개)

❍ 사업비 : 300,000천원 (27,390천원 / 선정제품 대당 조달단가)

❍ 기  간 : 2020. 4 ~ 10월

□ 설치 방법 등 검토

❍ 공원내 보수차량 진입불가로 보수가 어려운 노후 조명등은 철거 조치

- 철거 수량 : 15등(등주번호 43번~ 57번, 붙임 참조)

❍ 철거후 기존 기초는 재활용 가능시 하이브리드가로등 기초로 활용

❍ 루프형 하이브리드가로등의 여유 전력을 이용하여 인근 일반 가로등에 전력 공급 시범 설치후 성능 검증

- 보조 등주를 본체(2본 정도)와 30M 간격으로 우선 설치

- 조도 및 성능이 검증 되면 동일한 방법으로 시공(미흡시 단독형 시공)

❍ 보조 등주는 납품업체가 설치하되 자재는 별도 지급

❍ 기존 노후 조명등주 철거는 연간단가업체 작업지시

□ 향후 추진 계획

❍ 구매 발주 : 2020. 3.

❍ 시범 설치 : 2020. 4.~5.(제작기간 및 시범설치 후 성능 검증)

❍ 설치 완료 : 2020. 6.~10.31(유채꽃 축제 기간 등을 고려 설치)