문서번호	시설관리과-5344
결재일자	2020.3.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
김재현	정진호	변재홍		03/18 代안창수
협 조

『2019년 가압장 및 배수지 등 전기설비 유지보수공사(장기계속단가)』

설계변경 검토보고

2020. 3.

강서수도사업소

〔시설관리과〕

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『2019년 가압장 및 배수지 등 전기설비 유지보수공사(장기계속단가)』

설계변경 검토보고

「2019년 가압장 및 배수지 등 전기설비 유지보수공사(장기계속단가)」의 신규공종 및 계약물량 증감 발생에 따른 설계변경 및 심의위원회 개최 계획을 보고 드림.

Ⅰ	계약현황

○ 공  사  명: 2019년 가압장 및 배수지 등 전기설비 유지보수공사(장기계속단가)

○ 공사기간: 2019. 04. 01. ～ 2020. 03. 31.

○ 총부기금액: ************

- 1차수 계약금액 : ************

- 2차수 계약금액 : ************

○ 계약상대자: ****************

○ 공사규모

- 아리수올림터, 배수지 등 전기설비 정비

- 전기설비 고장 발생시 긴급 보수 등

Ⅱ	설계변경 근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 법률 시행령 제74조

- 설계변경으로 인한 계약금액의 조정

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규 39호, 2018.07.09.)

- 제13장 공사계약 일반조건 제6절 공사 설계의 변경 및 제7절 계약금액의 조정

Ⅲ	설계변경 검토내역

○ 설계변경 사유

- 신규공종 및 시공물량 증·감에 따른 계약금액 변경

○ 설계변경 금액

구 분		당 초	변 경	증·감	비 고
총 부기금액		************	************	0	총 계약금액 변동 없음 → 물량 증감
1차수	‘19년 계약금액	************	************	0
2차수	‘20년 계약금액	************	************	0

○ 시공물량(상세내역 별첨)

구 분	공 종	비 고
물량 감소	저독성난연가교폴리올레핀절연전선(옥내) 등 166개
물량 증가	강제전선관_철근콘크리트노출 등 3개
신규 공종	화재감지기 등 6개

Ⅳ	설계변경 심의위원회 개최

○ 일    시 : 2020. 3. 18(수) 16:00

○ 장    소 : 사업소 3층 회의실

○ 심의내용 : 설계변경 타당성 검토

○ 심의의원

- 위원장 : 시설관리과장

- 위  원 : 급수운영팀장, 시설운영팀장, 기전팀장외 6급 주무관 1명

- 간  사 : 공업8급 김재현

Ⅴ	행정사항

○ 설계변경 심의위원회 개최 후 심의결과에 따라 설계변경 시행.

붙 임 : 1. 설계변경 내역서 1부

2. 물량증감 및 신규공종 현황 1부

3. 설계변경 심의 결과서(서식) 1부

4. 검증확인서 1부.  끝.