투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	실시설계 설계변경 시행 및 준공기한 연기 의뢰(시립엘림노인전문요양원 녹색자금)

1. 시설과-879(2020.03.16.), 907(2020.3.17.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 추진 중인 『시립엘림노인전문요양원 녹색자금 지원사업 나눔숲 조성 실시설계용역』에 대하여 아래와 같이 설계 변경 및 준공기한을 연기 하여 사업추진에 만전을 기하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 시립엘림노인전문요양원 녹색자금 지원사업 나눔숲 조성 실시설계용역

나. 계약금액 : ***********

다. 용역기간 : 2020. 02. 10. ~ 2020. 03. 25.

라. 도 급 자 : ************

마. 용역비 변경내역

(단위 : 원)

구 분		소요 금액			비고
		당 초	변경	증 / 감
용역비	용역비	*********	*********
	손해배상공제료	******	******
	자문비	*******	*******
	측량비	*	*********	*********	*
	소계(천단위절사)	*********	**********	*********	*
	부가가치세	*******	*********	*******	*
총 용 역 비		*********	**********	*********	*

바. 준공기한 연기

- 당초 : 2020. 02. 10. ~ 2020. 03. 25.

- 변경 : 2020. 02. 10. ~ 2020. 04. 04.(10일 연장)

- 지체상금 부과여부 : 미부과

사. 예산과목

- 동부공원녹지사업소 시설과, 생활주변 녹지확충, 시민참여 녹지조성, 녹색자금지원사업(나눔숲·나눔길 조성), 시설비 및 부대비, 시설비(예산편성부서:푸른도시국 조경과)

붙  임 : 1. 설계변경 보고서 1부.

2. 준공기한 연기 검토 보고서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	최종성		공원조성팀장	하종식		시설과장	03/18 박종수
협조자
시행	시설과-912	(		)	접수		(		)
우	07062	서울 동작구 여의대방로20길 33 동부공원녹지사업소 시설과	/
전화	02-2181-1157	/전송	02-2181-1169	/	jongsung79@seoul.go.kr	/	부분공개(5)