문서번호	시설관리과-5420
결재일자	2020.3.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
김재현	정진호	변재홍		03/19 정진일
협 조

『2019년 가압장 및 배수지 등 전기설비 유지보수공사(장기계속단가)』

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

2020. 3.

강서수도사업소

〔시설관리과〕

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『2019년 가압장 및 배수지 등 전기설비 유지보수공사(장기계속단가)』

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

「2019년 가압장 및 배수지 등 전기설비 유지보수공사(장기계속단가)」건에 대한 설계변경 심의위원회를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ	사업개요

○ 공  사  명: 2019년 가압장 및 배수지 등 전기설비 유지보수공사(장기계속단가)

○ 공사기간: 2019. 04. 01. ～ 2020. 03. 31.

○ 총부기금액: ************

- 1차수 계약금액 : ************

- 2차수 계약금액 : ************

○ 계약상대자: ****************

○ 공사규모

- 아리수올림터, 배수지 등 전기설비 정비

- 전기설비 고장 발생시 긴급 보수 등

Ⅱ	설계변경 내역

○ 주요 계약물량 증감

공 종	규 격	단위	당초	변경	비 고
작업지시 8차(‘19.12.02.) - 우장산올림터 외 5개소 화재감지기 설치 공사 (미정산분)
아우트렛 박스	8각 54mm	개	1	11	증)10
강제전선관_철근콘크리트 노출	아연도 16mm	m	1	46	증)45
화재감지기	열감지기	개	0	2	증)2
화재감지기	광전식감지기(연)	개	0	7	증)7
작업지시 9차(‘20.02.17.) - 우장산올림터 외 10개소 자동식 소화기 설치 공사 등
자동식소화장치 설치	고체에어로졸(유리벌브식)	개	0	17	증)17
풀박스 설치	250×250×200×1.0t	개	0	1	증)1
가교폴리에틸렌(F-CV) 옥내	0.6/1kV F-CV 3C 4㎟	m	102	178	증)76

○ 계약금액 변경

구 분		당 초	변 경	증·감	비 고
총부기금액		************	************	0	총 계약금액 증감없음 (물량증감)
1차수	‘19년 계약금액	************	************	0
2차수	‘20년 계약금액	************	************	0

Ⅲ	설계변경 심의

○ 심의일시 : ’20. 03. 18(수) 16:00  3층 회의실

○ 심의내용 및 결과

- 설계변경 타당 여부 : 타당함

- 신규공정 적정 여부 : 적정함

- 공정별 계약물량 증감 및 계약단가 적용 적정 여부 : 적정함

- 제경비 적정 산정 및 적용 적정 여부 : 적정함

Ⅳ	행정사항

○ 설계변경 시행 후 우리사업소 행정지원과에 변경계약 의뢰

붙 임 : 1. 설계변경 심의결과서 1부

2. 변경내역서 1부

3. 물량증감표 1부.  끝.