문서번호	급수운영과-4685
결재일자	2020.3.19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
정기성	이훈재	03/19 채재일
협 조

『남창동 236-12 외 4개소』

배급수관 정비공사 현장 실정보고

2020. 3.

중부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

『남창동 236-12 외 4개소』

배급수관 정비공사 현장 실정 보고

시설공단으로부터『남창동 236-12 외 4개소 배급수관 정비공사』시행 중 4구간 실정보고 검토결과서에 대한 검토사항 및 조치계획을 보고 드림.

▢ 공사 개요

○ 관련근거: 공사 실정보고 검토결과서(공사감독2처-2334호, 2020. 3. 17.)

○ 공사현황

- 공 사 명: 남창동 236-12 외 4개소 배급수관 정비공사

- 공사위치: 중구 남창동 236-1 ~ 남대문로5가 541 외 4개소

- 공시개요: 배급수관 정비, 구경 D=80~400mm, L=1,253m

- 공사기간: 2019. 8. 27. ~ 2020. 5. 22.

- 시 공 사: ******************

- 공사감독: *****************

▢ 공단 실정보고 및 사업소 조치계획

구간	위치	실정 보고내용(공단)	조치 계획	적용사항
4구간	태평로2가 360-1~ 정동 5-1	관로 유지관리를 위한 다용도 밸브 (D300mm) 2개소 추가 설치	다용도 밸브 설치	설계변경 반영
		시▪종점부 연결시 단수/적수 발생, 민원 최소화를 위해 라인스토핑 설치(D300mm) 2개소 필요	무단수차단공법 (라인스토핑) 시행	설계변경 반영

▢ 추진 계획

○ 4구간, 다용도 밸브 설치 및 무단수차단공법(라인스토핑) 시행 지시(통보)

- 추후 정산하여 설계변경 반영

○ 무단수차단공법 관련규정 준수(배수과-7697호, 2019. 8. 9.)

붙임  1. 서울시공단 관련공문 및 실정 보고서 각 1부

2. 관련규정 각 1부.  끝.