문서번호	공간정보과-2891
결재일자	2020.3.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공간정보과장	시설안전부장
박광수		유명은	03/19 신용철
협 조
	주무관			홍석현
	주무관			신정민
	주무관			박현대

『2019년 상수도 GIS DB 정확도개선사업』

설계변경(최종) 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 3.

시설안전부

(공간정보과)

『2019년 상수도 GIS DB 정확도개선사업』

설계변경(최종) 시행계획

『2019년 상수도 GIS DB 정확도개선사업』과 관련하여 설계변경(최종)사항이 발행하여 시행계획을 보고 드림.

Ⅰ		용 역 현 황

□ 사업명 : 2019년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

□ 사업현황(측량 및 편집 : 840㎞, 6,894,000천원)

구 분		동부,북부지역	강서,남부지역	강남,강동지역	중부,서부지역
용역내용		측량 및 편집 : 210㎞ (신설27,기존183)	측량 및 편집 : 210㎞ (신설32,기존178)	측량 및 편집 : 210㎞ (신설29,기존181)	측량 및 편집 : 210㎞ (신설32,기존178)
용역기간	총차 (2차수)	’19. 4. 4. ～ ’20. 3. 31. (’20. 1. 1. ～ ’20. 3. 31.)
* * * *	**	***********	***********	***********	***********
*****		******* *******	***************	****** ***********	***** ********

□ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비,

사무관리비(상수도 GIS 구축)

Ⅱ		설계변경 내용 및 사유

동부, 북부지역

□ 주요 공종 물량 변경

❍ 총차

공 종	단위	당초	변경	증감	비고
4급 기준점 측량	점	12	12	-
신규 지하시설물 조사/탐사	㎞	32.8	32.4	감 0.4
기존 지하시설물 조사/탐사	㎞	178.1	178.6	증 0.5
지하시설물도 정위치 편집	㎞	210.9	211.0	증 0.1
누수복구 현장 대응	건	31	27	감 4

□ 설계변경 금액(용역비) : 금액 변경없음

(단위: 원)

구 분	총 차	1 차 수	2 차 수	비고
***	*************	*************	**********
***	*************	*************	**********
***	*	*	*

□ 설계변경 사유

❍ 당초 추정 물량으로 설계하였으나 사업이 마무리 단계에 도달함에 따라 실제 시행량에 맞추어 설계변경 시행

강서, 남부지역

□ 주요 공종 물량 변경

❍ 총차

공 종	단위	당초	변경	증감	비고
4급 기준점 측량	점	12	12	-
신규 지하시설물 조사/탐사	㎞	35	35	-
기존 지하시설물 조사/탐사	㎞	176.4	176.4	-
지하시설물도 정위치 편집	㎞	211.4	211.4	-
누수복구 현장 대응	건	56	58	증 2

□ 설계변경 금액(용역비) : 금액 변경없음

(단위: 원)

구 분	총 차	1 차 수	2 차 수	비고
***	*************	*************	**********
***	*************	*************	**********
***	*	*	*

□ 설계변경 사유

❍ 당초 추정 물량으로 설계하였으나 사업이 마무리 단계에 도달함에 따라 실제 시행량에 맞추어 설계변경 시행

강남, 강동지역

□ 주요 공종 물량 변경

❍ 총차

공 종	단위	당초	변경	증감	비고
4급 기준점 측량	점	12	12	-
신규 지하시설물 조사/탐사	㎞	24.9	25.9	증 1.0
기존 지하시설물 조사/탐사	㎞	185.6	184.6	감 1.0
지하시설물도 정위치 편집	㎞	210.5	210.5	-
누수복구 현장 대응	건	79	79	-

□ 설계변경 금액(용역비) : 금액 변경없음

(단위: 원)

구 분	총 차	1 차 수	2 차 수	비고
***	*************	*************	**********
***	*************	*************	**********
***	*	*	*

□ 설계변경 사유

❍ 당초 추정 물량으로 설계하였으나 사업이 마무리 단계에 도달함에 따라 실제 시행량에 맞추어 설계변경 시행

중부, 서부지역

□ 주요 공종 물량 변경

❍ 총차

공 종	단위	당초	변경	증감	비고
4급 기준점 측량	점	12	12	-
신규 지하시설물 조사/탐사	㎞	31.4	31.4	-
기존 지하시설물 조사/탐사	㎞	179.0	179.0	-
지하시설물도 정위치 편집	㎞	210.4	210.4	-
누수복구 현장 대응	건	43	43	-

□ 설계변경 금액(용역비) : 금액 변경 및 물량변경 없음

(단위: 원)

구 분	총 차	1 차 수	2 차 수	비고
***	*************	*************	**********
***	*************	*************	**********
***	*	*	*

Ⅲ		향 후 계 획

□ 최종 준공 처리   : 2020.  3. 31.

붙임  설계변경 내역서(최종) 각 1부.  끝.