문서번호	교량안전과-4108
결재일자	2020.3.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이제택		박찬규	03/13 하현석
협조

영동대교 보수공사 실시설계용역 발주계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 3

안전총괄실

(교량안전과)

영동대교 보수공사 실시설계용역 발주계획

『2018년 영동대교 정밀안전진단 용역』결과에 따라 영동대교 보수공사를 위한 실시설계용역을 발주코자 함.

□ 사 업 개 요

□ 사 업 명 : 영동대교 보수공사(장기계속)

□ 사업기간 : 2020. 3 ~ 2021. 12

**********************************************

(단위 : 백만원)

**********************************************************************************************************************************

□ 공사내용 : 본교 바닥판 보수 2,875㎡, 바닥판 철거 재시공 40㎡, 교각 보수 308㎡ 등

□ 영동대교 현황

시설물명	규 모	준공년도	종구분/등급	구 조	비 고
본 교	L=850m B=25m	1973.11	1종 / B등급	Steel Plate Girder	DB18
접속교	L=167m(100+67) B=25~34m	1995 2007		Steel Plate Girder PSCI 거더	DB18
램프(7개소) 및 자전거연결로	L=1465.92m B=4.5~7m	1987, 1995, 1997, 2007		Steel Plate Girder 강박스거더	DB24

□ 그 간 추진경위

□ 2018. 3 ~2019. 3 : 정밀안전진단 용역

**************, ********

***************************************************************

□ 2019. 4 : 정밀안전진단 결과 유지관리계획 수립

□ 2019. 7 : 실시설계 용역 타당성 심사 완료

□ 2020. 3 : 재난관리기금 심의 원안통과

□ 실시설계용역 시행방안

*************************

□ 용역기간 : 착수일로부터 90일

□ 실시설계 주요 내용

- 일부 바닥판 치환 및 보수, 바닥판 콘크리트 단면보수, H램프 교각보수 등

· 현장 조사 및 정밀안전진단용역 보고서를 바탕으로 문제점 검토 및 보수·보강공법 검토

□ 입찰방법

- 제한경쟁입찰(지역제한 및 자격제한)

· 입찰공고일 전일부터 입찰일까지 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 업체

※ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제4장(제한입찰운영) : 지역제한(추정가 2억 미만)

· 엔지니어링산업진흥법에 의거 건설부문 구조분야의 엔지니어링사업자 신고를 필한자

또는 기술사법령에 의거 건설부문 구조분야의 기술사 사무소 개설 등록을 필한자

□ 향 후 계 획

□ 2020.  3. ~ 7.          : 용역 착수 및 준공

□ 2020.  7. ~ 2021. 12. : 공사 시행

붙임  1. 실시설계용역 내역서 1부.

2. 영동대교 보수공사 실시설계용역 과업내용서 1부.

3. ’20년 영동대교 보수공사 추진계획(방침) 1부.  끝.