문서번호	하천관리과-4188
결재일자	2020.3.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	하천계획팀장	하천관리과장		물순환안전국장
임승민	이승우	한유석		03/16 이정화
협 조

홍제천 상류 보행환경개선

기본 및 실시설계 용역 발주계획

2020. 3.

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

홍제천 상류 보행환경개선

기본 및 실시설계 용역 발주계획

홍제천 단절된 보행로 연결 및 볼거리 제공으로 보행기반을 조성하고 인근 활성화된 등산로와 연계하여 시민 이용만족도 증대를 위한「홍제천 상류 보행환경개선 기본 및 실시설계 용역」을 시행코자 함

Ⅰ		관 련 사 항

○ 부시장보고(2019.6.14.) 및 시장단보고(2019.7.2.)

- 기존 사업내용 및 우선사업(1구간) 추진현황, 2‧3구간 사업 추진시 문제점

○ 홍제천 상류 사업계획 변경(하천관리과-10351호, 2019. 7.12)

- 기존 : 지역구분 3단계 사업추진 → 변경 : 전체 구간에 장·단기 사업추진

○ 보행환경개선 기본계획 수립(2019.12.)

- 홍제천 상류 자연성회복 및 경관복원 기본계획 수립 완료

Ⅱ		추진현황

○ ’19. 11. 18 : 용역 추진방침 수립

○ ’19. 11. 21 : 기술용역타당성 심사

○ ’20. 02. 24 : 건설기술심의소위원회(용역발주 심의)

○ ’20. 03. 03 : 용역 사전규격공개

○ ’20. 03. 09 : 사업수행능력 세부평가기준 협의

Ⅲ		용역개요

○ 용 역 명 : 홍제천 상류 보행환경개선 기본 및 실시설계 용역

○ 용역기간 : 착수일로부터 180일

○ 소요예산 : 247백만원

○ 주요 과업내용

- 기본계획을 반영한 홍제천 보행환경개선사업 기본 및 실시설계

- 관련부서(서울시, 자치구 등) 협의

Ⅳ		발주방법

○ 관련근거

- 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행안부 예규 제89호 ’19.10.4)

- 서울시 건설기술용역업자 사업수행능력 세부평가기준(’19. 5. 1)

○ 용역업자 선정 절차

입찰공고	⇨	사업수행실적 평가서 제출	⇨	사업수행실적평가(적격자 선정)	⇨	입찰집행 및 낙찰자 선정	⇨	계약체결

○ 주요내용

- 입찰방법 : 일반결쟁입찰[사업수행능력평가(PQ) 후 가격 입찰]

- 낙찰자선정 : 기술용역 적격심사(사업수행능력평가(PQ))

· 적격심사 : 수행능력평가점수(35)+입찰가격평점(60)+지역업체참여도(3)+경영상태(2)+기술인력(-10)+계약질서준서(-1) ≧ 95

- 계약상대 : 단독 또는 공동이행(2개사 이하)

- 용역기간 : 착수일로부터 180일

- 참가자격

· **************************************************************************************************************************************************************

· ******************************************************************************************************************************************

Ⅴ		추진계획

○ 입찰공고                   : ’20. 3.

○ 사업수행능력 평가 및 계약  : ’20. 3. ~ 4.

○ 용역착수                   : ’20. 4.

붙 임  1. 입찰공고문(안) 1부.

2. 과업내용서 1부.

3. 사업수행능력평가 세부기준 1부.

4. 설계내역서 1부.  끝.