“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	구의아리수정수센터
수신자	행정관리과장
(경유)
제 목	계약의뢰(2019년 구의아리수정수센터 토목·건축 시설물 정비공사)

우리 정수센터에서 시행중인 『2019년 구의아리수정수센터 토목․건축 시설물 정비공사(장기계속공사)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(2차)하였기에 계약의뢰 합니다.

가. 공사개요

○ 공 사 명: 2019년 구의아리수정수센터 토목․건축 시설물 정비공사(장기계속공사)

○ 도 급 자: ㈜베스트로드 대표 라윤주

○ 도 급 비: *************

○ 공사기간: 2019. 4. 11. ~ 2020. 3. 31.

나. 설계변경

○ 차수 및 설계변경 금액(도급비)

구 분	당초금액(원)	변경금액(원)	증·감액(원)
1차수 금액	**********	**********	-
2차수 금액	**********	**********	***********
총부기금액	***********	***********	***********

○ 설계변경사유

- 작업지시에 따른 공종별 물량 증․감 및 신규공종 발생 부분 설계 반영

다. 예산과목: 상수도사업비, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

붙 임: 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 합의서 1부.

3. 관련 보고서 1부.  끝.

	정수시설과장
주무관	윤기영		정수시설과장	03/17 조귀현
협조자
시행	정수시설과-676	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 광나루로 571 (구의동)	/
전화	3146-5480	/전송	3146-5409(주간)5408(야간)	/	life@seoul.go.kr	/	부분공개(5)