문서번호	토목부-5584
결재일자	2020.3.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	토목설계과장	토목부장		시설국장
김종혁	김동현	代진재섭		03/18 박상돈
협 조

실시설계용역 자문회의 개최 결과보고(1차)[서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 실시설계]

실시설계용역 자문회의 개최 결과보고(1차)

[서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 실시설계]

2020. 3.

도시기반시설본부

토목부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

실시설계용역 자문회의(1차) 개최 결과 보고

“서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 실시설계용역”에 대한 자문회의를 개최하고 결과를 보고드림

1	사업개요

❍ 사 업 명 : 서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 실시설계

❍ 규    모 : 왕복 4차로, 연장 8.1km, 친환경공간 조성 119천㎡

❍ 설계기간 : '19.7.16. ~ '20.11.15.

❍ 총사업비 : 85,950백만원 (실시설계비 : 2,141백만원)

❍ 설 계 사 : ㈜유신,㈜도화엔지니어링,㈜경동엔지니어링,㈜진우엔지니어링코리아, ㈜도진엔지니어링

❍ 위 치 도

2	추진경위

❍ '16.06.03.	: 서남부지역 발전을 위한 서부간선도로 지하화 추진계획 검토 보고

❍ '13.09. ~ ’15.02.    : 타당성 조사 및 기본계획

❍ '15.10.28.	: 투자심사 완료

❍ '16.05. ~ '19.03.   : 기본설계 용역 시행

❍ '19.03.29.	: 기본설계용역 추진 완료 보고

❍ '19.07.16.	: 실시설계용역 착수

❍ '19.08.30.	: 착수보고회

❍ '19.09. ~ '19.12.	: 세부 현황조사, 교차로 세부설계, 관계기관 협의 등

❍ '19.01. ~ '20.02.	: 구간별 실시설계 노선 검토

3	실시설계 자문회의(1차) 개최 결과

□ 자문회의 개최 개요

❍ 안  건 : 서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 실시설계용역

❍********2020. 3.10.(화) 15:00 ~ 18:00

❍*장  소 : 도시기반시설본부 11층 대회의실

❍*참석자

- 내부위원 : 시설국장(위원장), 토목부장, 토목설계과장, 토목총괄과장, 영등포구 도로과장, 구로구 도로과장, 금천구 도로과장, 도로계획과 민자사업팀장, 교통운영과 교통개선팀장

- 외부위원 : ㈜선진콘트롤앤엑세스 강승국 위원(도로), ㈜한국종합기술 김상규 위원(교통), ㈜이산 이상우 위원(토목구조)

- 설 계 사 : ㈜유신외 4개사, 소규모 환경영향평가/재해영향평가사

- 건설사업관리(설계감리) : ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소

- 분야별 실무자 : 조경, 설비분야 담당직원

- 발 표 자 : 설계용역 사업책임자(㈜유신 심재만 전무이사)

□ 주요 자문내용

❍ 장래 서부간선지하도로는 소형차만 통행이 가능하며, 서부간선도로 일반화시 대형차량이 통행하고 차량의 크기가 대형화 추세이므로 2차로는 3.25m→3.5m로 확대하여 통행안전성 확보 (강승국 위원)

❍ 기존 육교 200m 반경안에 횡단보도를 설치하는 것은 도로교통법 위배로 경찰청과 사전협의후 설계 반영 (강승국 위원)

❍ 도시부 도로의 차로폭이 과다하게 넓으면 과속의 우려가 있으므로 차로폭은 최소기준에 맞게 축소 (김상규 위원, 금천구)

❍ 모든 교차로에는 좌회전전용차로 설치 필요, 우회전 교통량이 많은 곳은 우회전 감속차로 설치 (김상규 위원, 교통운영과)

❍ 주민들 요구시 주민설명회 적극 개최 요청 (영등포구)

❍ 구일역 앞 친환경공간 조성 예정 공간은 공공개발기획단의 행복주택 계획을 반대하며, 도시계획시설 결정시 도로(공원)의 중복 결정 요망 (구로구)

❍ 금천구 G밸리 구간의 자전거도로는 삭제하고 서부간선도로상에 1차로 추가 확보 요망 (금천구)

❍ 구로구 구일역 구간의 도시계획시설 결정시 공공개발기획단과의 협의를 통해서 시행하기 바람 (도로계획과)

❍ 기존 육교의 유지관리 어려움과 무단횡단 사고가 발생할 우려가 있으므로 철거하는 방안을 구청과 협의하여 검토 (위원장)

❍ 지하차도는 교차로 형성시 메우지 말고 중공처리하는 방안 검토 (위원장)

□ 자문의견 조치계획

❍*주요 자문의견 및 위원별 자문의견서를 건설사업관리자(설계용역자)에게 통보하여 조치계획서 작성

❍*조치계획서를 향후 시설물 유지관리기관인 각 구청에 통보하여 별도 협의

□ 향후 추진계획

❍ '20.03. ~ '20.04. : 자문회의 결과 및 조치계획서 각 구청 통보

❍ '20.04.	: 실시설계 자문회의 (2차)

❍ '20.06.	: 실시설계 VE

❍ '20.08.	: 인허가 절차 이행

❍ '19.11.15.	: 실시설계 완료

붙임 : 1) 참석자 명단 및 사진대지 1부.

2) 실시설계 자문 의견서 각 1부.  끝.