“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(3회,최종) 시행(2019년 포장복구공사)

1. 본부 안전총괄과-3331호(2020.3.19.) “계약금액 조정 결과 통보”와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인 『2019년 서부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)』에 대하여 본부 안전총괄과의 계약금액 조정결과 및 계약금액조정 검증시스템 검증결과에 따라 아래와 같이 최종 설계변경(3회)을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2019년 서부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)

나. 계약대상자 :***********************

다. 공사  기간 : 2019. 6. 03. ~ 2020. 6. 30.

라. 설계변경 금액내역                                               (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증․감	비 고
총 공사비		*************	*************	*************	설계 심사 완료
도급비	1차수(2019년)	*************	*************	*
	2차수(2020년)	***********	***********	*************

마. 설계변경 사유 : 계약물량 증 ․ 감                                        (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	주요 공종
합 계	*************	*************	***********
1.토 공	***********	***********	***********	아스팔트포장절단 등
2.포장공	***********	***********	***********	보조기층공 등
3.부대공	**********	**********	***********	소형공사안내간판 등
4.사급자재비	**********	**********	**********	보조기층재 등
5.제경비	***********	***********	***********	산재보험료 등

바. 최대정산 이행금액(1회 최대 정산금액) : 금213,543,000원

사. 증액 소요예산 조치 : 2020년 다음 예산에서 지출

- 상수도사업비용 영업비용 배급수비 신설공사비 : 101,328,900원

붙임 : 1.설계변경내역서 1부

2.설계변경검토보고서 1부.

3-1.계약금액 조정결과통보(공문) 1부.

3-2.계약금액 조정검토 결과서 1부.

4.계약금액 조정 검증확인서 1부.

5.합의서 1부.끝.

급수관리팀장	김승완		급수운영과장	이병운		서부수도사업소장	03/20 박영헌
협조자
시행	급수운영과-4824	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/
전화	3146-3651	/전송	3146-3689	/	wan300@seoul.go.kr	/	부분공개(7)