문서번호	시설보수과-2540
결재일자	2020.3.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김규춘		박병연	03/20 박문희
협 조

“가리봉철도고가 정밀안전진단 및 공단IC 정밀안전점검용역”

용역 착수보고회 개최 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

강서도로사업소

시설보수과

용역 착수보고회 개최 결과보고

금년도 용역추진 중인『가리봉철도고가 정밀안전진단 및 공단IC 정밀안전점검용역』에 대한 착수보고회 개최 결과 보고 임

Ⅰ		대 상

연번	용 역 명	용역기간	용역금액 (천원)	용 역 사	비고
1	가리봉철도고가 정밀안전진단 및 공단IC 정밀안전점검용역	‘20.2.28~ 10.24	171,700	(재)한국건설품질연구원 대표 김인식

Ⅱ		착수보고 개요

일 시 : 2020. 3. 19(목) 14:00 ~ 장 소 : 사업소 본관 2층 소장님실 참석자 : 총 6명 ○ 사업소 : 사업소장, 시설보수과장, 시설담당 ○ 용역사 : 사업책임기술자 외2명
	착수보고회 진행사진

Ⅲ		보고내용

과업추진 개요

전차용역보고서 등 현장조사 결과에 따른 세부 세부추진 계획 보고

시설물별 주요부재에 대한 중점점검 사항 보고

과업수행 일정 및 조직구성, 인원 및 장비투입계획 보고

안전관리계획 및 교통처리계획 등 기타 필요한 사항

Ⅳ		회의결과 주요내용

전차용역 보고서를 활용하여 손상진행여부, 보수부 재손상 등을 비교 작성

하여 외관조사망도에 표기하고, 외관조사 결과에 대한 원인과 분석으로

보수·보강 방안 제시 할 것

특히, 강도시험등에 관하여 이전 시험위치를 파악하여 동일위치상 시험을 실시

하고 그 결과를 확인할 것

과업수행에 있어 중대한 결함 발견시 즉시 보고하여 시설담당이 현장 확인하고

대처할 수 있도록 할 것

현장조사시 시설물담당자 및 시설보수과장이 합동으로 참여할 수 있도록

사전 보고하기 바람(현장사진 첨부)

관리자 입장에서 안전점검을 할 수 있도록 시설물별 중점관리 지점,점검동선    등 로드맵을 작성 제출할 것

시설별 부속시설물, 첨가시설물, 교량하부 점용시설에 대하여 일제조사후 이상유·무

및 설치현황을 사진첨부 기록하여 수록할 것.

과업수행시 보수·보강공사 추진구간에 대하여 하자발생 여부를 상세히 조사하고 하자   보수가 이루어 질 수 있도록 위치별 물량을 작성 제출할 것

붕괴유발부재 및 중점관리 부재는 별도 확인할 수 있도록 위치별 주요사진을

첨부하여 체크리스트에 의거 점검할 수 있도록 작성 제출할 것

과업수행시 안전사고 방지 및 안전점검 시행중임을 알 수 있도록 안내표지판 설치, 점검자의 안전복착용 등 안전사고 예방에 철저를 기해줄 것

외관조사를 7월말까지 완료하여 익년도 사업예산 편성에 차질이 없도록 할 것.

교량 시설물에 받침장치 및 신축이음장치 거동 변이량 측정하고 사진첨부하여

보고서에 수록할 것

강우시(강우종료후 즉시) 현장을 확인하여 누수 및 배수지장 여부를 확인하여 보고서에 기재할 것

S5 바닥판 하면 망상균열부, S12 가벤트 설치 및 거더 단면보수부에 대한 이상여부에 대해 중간보고시 별도보고할 것.

Ⅴ		향후계획

2020.3.23. : 착수보고회 개최 결과 주요내용 용역사 통보.

2020.3월 ~ 10월 : 과업추진.  끝.