실정보고 검토서

공사명

강남순환도시고속도로 4공구 건설공사

공사개요

· 위    치: 금천구 독산동~소하동 JCT

· 규    모: 폭4~8차로, 연장 2.48㎞

· 공사기간: ’01.12.29.~’20.5.31.

· 도 급 비: 202,020백만 원

· 시공사: 롯데건설(주)

· 감리단: ㈜서영엔지니어링

· 설계사: ㈜서영엔지니어링

실정보고 건명

박미지하차도 종배수관 변경 시공 정산

실정보고

사유

박미지하차도 집수정 배수처리를 위한 종배수관 설치계획 구간에 지장물이 저촉되어 종배수관 변경 시공에 대한 물량 정산

건설사업관리단

검토의견

박미지하차도 종배수관의 시공변경 및 정산에 대한 수량 및 공사금액은 적정함.

공기에 미치는 영향

(  -  )  개월

변경(안)

구분	당초	변경	비고(증감)
규모	터파기 2,764m3 종배수관(D600) 76m 종배수관(D1200) 13m	터파기 2,754m3 종배수관(D600) 73m 종배수관(D1200) 16m	감) 10m3 감) 3m 증) 3m
금액	432,900,000	432,200,000	감) 700,000

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 (    )

당초 사업비 범위내 시행가능 ( ○ )

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

추가 행정절차 이행 필요여부

- “해당 없음”

발주처

검토의견

박미지하차도 집수정 종배수관 변경 시공에 대한 책임건설사업관리기술자의 정산 실정보고는 적정함

비 고

결재

담당

김구

과장

장수철

부장

03/20

김용제