실정보고 검토서

공사명

강남순환도시고속도로 4공구 건설공사

공사개요

· 위    치: 금천구 독산동~소하동 JCT

· 규    모: 폭4~8차로, 연장 2.48㎞

· 공사기간: ’01.12.29.~’20.5.31.

· 도 급 비: 202,020백만 원

· 시공사: 롯데건설(주)

· 감리단: ㈜서영엔지니어링

· 설계사: ㈜서영엔지니어링

실정보고 건명

금하지하차도 교통안전시설물 추가 설치

실정보고

사유

금하지하차도 개통(’19.12.28.)에 따른 관계기관(광명경찰서) 협의 결과 교통안전시설물 추가 설치 요청 반영

※ 관련문서: 경비교통과-12999(2019. 12. 29.)

건설사업관리단

검토의견

금하지하차도 개통을 위하여 광명경찰서와의 협의 결과 교통안전시설에 대한 추가 보완이 필요하며 수량 및 공사비 산정이 적정함.

공기에 미치는 영향

(  -  )  개월

변경(안)

구분	당초	변경	비고(증감)
규모	- - - - 충격흡수시설 6개소	시선유도(빗금도장) 4,651m2 시인성 도장 5,757m 경광등(태양광) 1개소 LED표지판 3개소 충격흡수시설 7개소	증) 4,651m2 증) 5,757m 증) 1개소 증) 3개소 증) 1개소
금액	3,900,000	202,000,000	증) 198,100,000

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 (    )

당초 사업비 범위내 시행가능 ( ○ )

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

추가 행정절차 이행 필요여부

- “해당 없음”

발주처

검토의견

금하지하차도 개통(’19.12.28.)에 따른 관계기관(광명경찰서) 협의 결과 교통안전시설물을 추가 설치비 반영은 적정함

비 고

결재

담당

김구

과장

장수철

부장

03/20

김용제