문서번호	방재시설부-4435
결재일자	2020.3.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
손병도		이병호	전결 03/24 박홍봉
협조	건축관리과장		차무흥
	주무관		김희숙

「돈의문 박물관마을 수직정원 조성공사」

준공기한 연기 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

방재시설부

「돈의문 박물관마을 수직정원 조성공사」

준공기한 연기 검토보고

「돈의문 박물관마을 수직정원 조성공사」에 대하여 지장물(돈의문 VR체험관) 등 이전 지연으로 절대공기가 부족하여 준공기한을 연기하여 공사추진에 만전을 기하고자 함

‣관련근거 : 공사기간 연기원 제출 (AC-2020-제03-23-1호,’20.3.23)

지장물 철거완료 보고 (방재시설부-19306호, ’19.12.23)

□ 공사개요

○ 위  치 : 종로구 새문안로 37번지 일대

○ 규  모 : 건물5동(D동, H1~H4) 구조보강 및 벽면녹화, 경관조명

(수직정원 552㎡, 옥상정원 170㎡, 가로녹지 148㎡, 온실 77.74㎡)

○ 도 급 비 : 1,083,288천원 (관급비 38,389천원 별도)

○ 공사기간 : ’19.11.11. ~ ’20.5.8.(180일)

○ 시공/감리 : (유)연일종합조경 외2 / 엘림아키건축사무소 외1

□ 추진경위

○ ’18.07.17 : 시장 요청사항 (추진부서 : 조경과)

(수직정원 시범설치 등 도시녹화의 새로운 방안 모색)

○ ’18.12.26 : 설계용역 착수(도시공간개선단)

○ ’19.08.27 : 설계용역 준공

○ ’19.10.16 : 공사시행 요청(도시공간개선단 ⇒ 도시기반시설본부)

○ ’19.10.22 : 공사발주 및 계약 의뢰

○ ’19.11.11 : 공사착공

○ ’19.11.29 : 지장물(돈의문VR체험관) 이전 관계부서 대책회의

○ ’19.12.17 : 지장물(돈의문VR체험관,돈의문상회) 이전 완료

○ ’19.12.23 : 가설공사 착수(실착공)

○ ’20.03월 현재 : 온실동 철골공사(구조보강) 진행중(공정율 18.34%)

□ 검토내용

○ 공사기간 연장계획

- 당초 : 2019.11.11. ~ 2020.05.08

- 변경 : 2019.11.11. ~ 2020.06.18.(증 42일)

○ 연기사유

- 공사구간 내 지장물(돈의문VR체험관, 돈의문상회) 이전 지연(42일)으로 인한 절대공기(180일) 부족으로 공사기간 연기가 불가피한 실정임

○ 귀책사유 및 지체상금 부과여부

- 귀책사유 : 도시기반시설본부

- 지체상금 : 미부과

□ 건축사 감리 검토의견

○ 시공사에서 제출한 공사기간 연기원 연장사유와 같이 현장내 돈의문 박물관 3D체험관 이전 지연으로 인해 42일후 실제 공사 착공됨으로 상기와 같이 공가기간 연기가 적정한 것으로 사료됨

□ 보고자 검토의견

○ 공사기간 연장 건에 대하여 건축사 감리의 검토의견이 적정한 것으로 판단됨으로 공기를 연장하여 공사추진에 만전을 기하고자 함

붙임 : 1. 공사기간 연기원 제출 1부

2. 지장물 철거완료 보고서 1부

3. 관계부서 회의결과 보고서 1부.  끝.