문서번호	도시철도토목부-3432
결재일자	2020.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
최경호		허동	03/24 정대현
협 조
	주무관			김근수

『하남선(5호선 연장) 궤도공사(2공구)

운전표지 설치 및 개선 요청에 대한 검토

2020. 03.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

「하남선(5호선 연장) 궤도공사(2공구)」

운전표지 설치 및 개선 요청에 대한 검토 보고

“하남선(5호선 연장) 궤도공사”에 대해 서울교통공사에서 운전설비 점검을 실시하여 운전표지(선로곡선표지, 열차정지위치표지, 열차정지표지)의 설치 및 개선 요청에 대한 검토 보고임.

관련근거 : 승무시스템-1061호(2020.03.17.) 5호선 하남선 본선구간 및 정거장    운전표지 현장조사 결과 알림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 하남선(5호선연장) 궤도공사(2공구)

○ 공사기간 : 2018.11.05. ~ 2020.12.31.

○ 계약금액 : 4,616,855천원

○ 계 약 자 : 화성궤도(주)

○ 건설사업관리 : ㈜신승엔지니어링 외 2사

□ 계약현황

구 분	총 차	1차(준공)	2차(진행중)	3차(준공)
공사기간	2018.11.05. ∼2020.12.31.	2018.11.05. ∼2018.12.31.	2018.12.21. ∼2020.12.31.	2019.01.21. ∼2019.11.04.
공사금액 (천원)	4,616,855	50,000	2,016,255	2,550,600

□ 추진현황

○ 2018.12.31. : 궤도공사(1공구 : 1단계 구간) 준공

○ 2019.11.05. : 궤도공사(2공구 : 2단계 구간) 공사 중지

○ 2019.07.23. ~ 현재 : 철도종합시험운행(1단계 구간)

○ 2020.04.01. ~ 현재 : 철도종합시험운행(2단계 구간)

□ 현황 및 문제점

○ 서울교통공사에서 실시한 하남선(5호선 연장) 1단계 구간 운전설비 점검중 미비사항 보완요청(승무원 인적오류 예방 및 열차안전운행 확보)

- 운전표지 설치 및 개선 요청

선로곡선표지	열차정지위치표지	열차정지표지

○ 선로곡선표지 설치 : 궤도분야 설치, 관리

※ 선로곡선표지 : 선로의 곡선에 의하여 열차운전속도의 제한이 필요한 곡선에는 그 시작 지점에 선로곡선표지 설치

○ 열차정지위치표지 설치 : 해당 역에서 설치, 관리

※ 열차정지위치표지 : 정거장에서 열차 또는 차량이 정차할 맨앞 위치 표시

○ 열차정지표지 설치 : 궤도분야 설치, 관리

※ 열차정지표지 : 열차의 정지한계 표시(선로에 도착하는 열차는 열차정지표지를 지나서 정차 불가)

○ 곡선(R=140m~R=439m) 구간

- 18개소(상선 : 9개소, 하선 : 9개소)

○ 열차 정차개소

- 정거장 : 6개 정거장(상일동역 이설 구간 포함)

- 유치선 : 4개소(상선 2개소, 하선 2개소)

[1단계 개통구간(H3 정거장 이후), 2단계 개통구간(H5정거장 이후)]

□ 검토사항

○ 선로곡선표지는 곡선(R=140m~R=439m) 구간의 열차운전속도(35km/h~75km/h)의 제한이 필요한 표지로 궤도분야에서 설치, 관리하나 설계에 미반영

○ 열차정지위치표지는 정거장에서 열차의 정차 위치를 표시하는 표지로 해당 역장이 설치, 관리(유치선에는 별도의 관리주체 없음)하나,   신설 공사로 관련부서 없음

○ 열차정지표지는 선로에 도착하는 열차의 정지 한계를 정하는 표지로 궤도분야에서 설치, 관리하나 설계에 미반영

○ 선로곡선표지, 열차정지위치표지 및 열차정지표지를 궤도분야에서 일괄 제작 설치하여 열차안전운행 확보함이 타당함.

○ 공사비 검토

공 종 명	규 격	단위	수량	금 액		비고
				단가	금액
2-6. 제표공사
선로제표설치	선로곡선표지,지하	개소	18	70,237	1,264,266
선로제표설치	열차정지위치표지,지하 (평면형, 돌출형)	개소	24	70,237	1,685,688
선로제표설치	열차정지표지,지하	개소	4	70,237	280,948
직접공사비					3,230,902
제 경 비					807,725	25% 적용
공사비 합계					4,038,627

□ 조치계획

○ 상기 보고 내용과 같이 서울교통공사에서 요청한 운전표지 설치 및 개선사항을 영업시운전 및 열차안전운행 확보를 위하여 우선 시공하고, 추후 설계변경시 반영하고자 함.

- 개략 사업비 : 증 4,039천원.

붙임 : 1. 관련문서 사본 1부

2. 제표추가 개소별 명세표 1부.  끝.