문서번호	배수과-3110
결재일자	2020.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
박종혁		김원수	03/24 이규상
협조	주무관		문정주
	주무관		조성균

상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿음직한 아리수

대형 상수도 공사장 순회 점검 계획

2020. 3.

급 수 부

[배수과]

대형 상수도 공사장 순회 점검 계획

`19년 사고이월 송배수관 정비공사 및 원인자 시행 대형 상수도관 이설공사 현장에 대하여 순회 점검을 실시하여 사업 추진에 철저를 기하고자 함.

Ⅰ		공사 현황

1. `19년 사고이월 송배수관 정비공사

○ 공 사 건 수 : 마포구 월드컵로 등 5개 공사

○ 소 요 예 산 : 13,100백만원(사고 이월액 : 7,160백만원)

○ 부 설 연 장 : 4.8㎞

○ 사업소별 현황

연번	시행부서	공사명	공사개요		소요예산 (백만원)	공사기간	비고
			구경 (mm)	연장 (m)
	합계	5건	700~ 900	4,800	13,100
1	서부	마포구 월드컵로 노후 송배수관 정비공사	400	400	600	19.9.23~20.5.31	송배수관
2	남부	양평동4가 323~당산동5가 32-1번지간 외 3개소 송배수관 정비공사	900	1,000	4000	19.5.20~20.5.30	송배수관
3	강남	한남IC~압구정역간외 3개소 송배수관 정비공사	700	1,100	2,150	19.4.11~20.4.27	송배수관
4	강남	경기고사거리~봉은사역사거리간외 1개소 송배수관 정비공사	1350	800	4,250	19.5.9~20.4.30	송배수관
5	강서	오류동 118-39외 1개소 송배수관 정비공사	500	1,500	2,100	19.9.16~20.6.30	무단수

2. 대형 상수도관 이설공사 현황

연번	담당 사업소	공사명	공사개요		공사기간	발주부서 (원인자)
			구경 (mm)	연장 (m)
	합계	2건	700~ 900	2,450
1	남부	신림봉천 터널 도로건설공사 구간중 지장 상수관로 이설공사	900~ 1500	1,150	10.10.∼23.12.	도시기반 시설본부
2	강남	대모지하차도 설치공사 구간중 지장 상수관로 이설공사	1800	1,300	18.6.~22.12.	도시기반 시설본부

Ⅱ		점검실시 개요

○ 점검대상 : 본부 산하 4개 수도사업소 7개 공사 현장

○ 점 검 반 : 2개조 조편성(3인 1조)

○ 점검일정 : 2020. 3. 25.~ 4. 10.(17일)

○ 점검방법 : 공사현장별 공사일정에 의하여 조별 공사현장 점검

○ 사업소별 점검일정

구 분	서 부	강 서	남 부	강 남
점검일시	3.25(수) ~ 3.27(금)	3.30(월) ~ 3.31(화)	4.1(수) ~ 4.6(월)	4.7(화) ~ 4.10(금)

※ 본부 및 사업소 여건에 따라 점검 일정은 변경될 수 있음.

○ 주요점검내용

- 설계도면 심사 결과 반영 공사추진 여부

- 공사현장 점검

․ 현재 추진현황 및 공정점검(공정 부진현장 만회대책 수립여부)

․ 공사현장 자재관리 적정성 점검.

․ 교통안전대책 시행여부 및 작업자 안전관리실태 점검

․ 공사현장 주변 시민불편사항 발생 방지대책 수립 여부 등

- 원인자 이설공사 현장 이설승인조건 이행여부 등.

Ⅲ		행정사항

○ 수도사업소

- 점검일정에 맞추어 본부 점검자 현장 안내

- 당초 점검일정에 공사가 없을 경우 서울시설공단 감독자와 협의하여 향후 점검일정을 본부에 통보

- 공사관련 자료(설계도면,교통소통대책 도면 등)준비

○ 서울시설공단

- 공사감독자는 현장에서 본부 점검에 적극 협조

- 공사관련 자료(자재 수급내용,사급자재 현황, 작업자 교육일지 등) 준비

- 현장지적사항에 대한 조치결과를 보고

○ 기타사항

- 야간 현장 점검자는 시간외 근무명령에 의하여 초과근무 인정.

Ⅳ		향후계획

○ 지적사항 조치 및 애로사항 반영․개선하여 사업추진 철저.

붙임 : 1. 공사현장 점검표(양식) 1부.

2. 2019년 사고이월 사업 관리카드 1부.

3. 원인자 이설공사 현장 관리카드 1부.  끝.