문서번호	한양도성도감-3430
결재일자	2020.3.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	도성보존팀장	한양도성도감과장
구선이	곽동진	03/23 代김종필
협 조	주무관		박근우
	주무관		박춘복

『한양도성 혜화문 소화전 설치 공사』

설 계 용 역   시 행 계 획

2020. 3.

문 화 본 부

한양도성도감

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	관련기관 자문
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	문화재청 재난안전예산
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

「한양도성 혜화문 소화전 설치 공사」

설 계 용 역  시 행 계 획

한양도성 혜화문의 소화전 설치 공사를 위한 설계용역을 시행하고자 함

Ⅰ		용역개요

□ 용 역 명 : 한양도성 혜화문 소화전 설치공사 설계 용역

□ 용역내용 : 혜화문 소화전 설치 공사를 위한 설계도서 작성

- 소방용수 확보를 위한 상수도소화전 설치위치, 펌프용량, 전기 배선 등

- 혜화문 반경 40m 이내에 옥외소화전(호스릴) 1개소 설치

□ 용역금액 : ********************

□ 용역기간 : 착수일로부터 50일

Ⅱ		추진경위

□ 2019. 08. 14. : ‘소방시설 미설치 대상’ 재난안전 관리사업 예산 신청 요청(문화재청 안전기준과-4371(2019.8.14.)호)

□ 2019. 08. 21. : 문화재 재난방지시설 구축 예산 신청(중부수도사업소와 상수도 인입공사 소요예산 등 사전 협의 완료)

□ 2019. 09. 16. : 2020년 문화재 재난안전 관리 국고보조금 예산(안) 사전 통지(50백만원(국비 35, 시비 15백만원))

□ 2019. 12. 24. : 2020년 문화재 재난안전관리 국고보조금 예산 확정 통지(50백만원(국비 35, 시비 15백만원))

□ 2020. 02. 13. :『한양도성 혜화문 소화전 설치계획』 방침수립

(한양도성도감-1649(2020.2.13.)호)

Ⅲ		용역발주계획

○ 입찰 방법 : 수의계약

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조1항제5호

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제30조1항

○ 수의계약 대상자

- 상  호 :**********

※「소방시설공사업법 시행령」제2조1항에서 규정한 소방시설 설계업으로 등록된 업체

- 대표자 : *****************

- 주  소 : **************************

○ 수의계약 사유

: 당해 예정용역비가 소액으로 수의계약이 가능하며, 효율적인 사업시행을 위해 종로구 관할지역내 문화재 소방시설 설계·시공 경험이 있는 업체와 수의계약 하여 추진

○ 예산 과목

- 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존관리활용, 한양도성 보존정비, 한양도성 통합관제망 구축 및 운영-문화재 재난방지 시설구축, 시설비

※ 기술용역심사는 기술심사담당관-4525(2020.2.28.)호「기술용역 타당성심사 업무개선 안내(2차)」관련하여 부서 자체심사

Ⅳ		향후일정

□ 2020. 3. : 소화전 설치 공사 실시설계 발주 및 시행

□ 2020. 4. : 문화재청 안전기준과 설계승인

□ 2020. 5. ~ 7. : 상수도 인입공사 시행

□ 2020. 8. ~ 10. : 소화전 설치 공사 시행

붙임  1. 과업내용서

2. 용역비 견적서 및 산출기초조사서.  끝.