문서번호	물순환정책과-5687
결재일자	2020.3.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	통합물관리팀장	물순환정책과장		물순환안전국장
유동구	조장환	임춘근		03/23 이정화
협 조
	수질관리팀장		정병권

『한강 수질관리 종합대책 수립』

기 술 용 역  발 주 계 획

2020. 3.

물순환안전국

(물순환정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	기술용역 심의 결과 반영
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

『한강 수질관리 종합대책 수립』

기 술 용 역  발 주 계 획

한강 수질의 비젼 제시 및 수질관리에 대한 종합적인 관리 전략을 수립하기 위하여 『한강 수질관리 종합대책 수립』기술용역을 시행하고자 함

1		용역개요

□ 과 업 명 : 한강 수질관리 종합대책 수립

□ 과업기간 : ‘20.5월 ∼ ‘21.10월(착수일로부터 18개월)

□ 소요예산 : 1,000백만원

□ 계약방법 : 일반경쟁입찰(협상에 의한 계약)

□ 주요 과업내용

❍ 현황조사 및 여건분석

❍ 주요하천의소유역도 작성 및 하천 배출경로 분석

❍ 하천의 수질 및 오염원 분석

❍ 한강 본류 및 지천 등 수질 및 유량 모니터링

❍ 수질개선을 위한 수치모델 구축 및 검토

❍ 강우시 수질 오염원이 하천수질에 미치는 영향 분석

❍ 한강 수질개선을 위한 종합대책 마련

2		추진현황

□ ‘19.09.25. : 기술용역 추진계획 수립

□ ‘19.10.18. : 기술용역 타당성심사 심의(적정)

□ ‘20.03.16. : 기술용역 발주심의 요청

※ 재무과 계약 의뢰시 심의 결과 반영(과업내용서)

3		발주 및 제안평가 계획

□ 발주개요

❍ 입찰방법 : 일반경쟁입찰

❍ 낙찰자 선정방식 : 협상에 의한 계약

❍ 입찰 참가자격

- 아래의 ①~②에 해당하는 자격을 갖춘 업체가 공동도급(분담이행방식, 공동이행방식)으로 입찰에 참여하여야 하며 대표사는 ①항에 의한 주관 사업책임 기술자 소속 업체이어야 하며, 공동 수급업체 구성원은 공동도급(분담이행방식, 공동이행방식)에 필요한 자격을 충족하여함

① 『엔지니어링산업진흥법』 제21조 규정에 의거 입찰공고일 현재 건설부문(상하수도, 수자원개발), 환경부문(수질관리)에 엔지니어링 활동 주체 신고를 필한 업체 또는 기술사법 제6조에 의거 건설분야(상하수도, 수자원개발), 환경·에너지 분야(수질관리)의 기술사 사무소를 개설 등록한 업체

② 아래요건 중 1개 이상의 자격을 보유하고 나라장터(G2B)에 입찰서제출 마감일 전일까지 학술. 연구용역(업종코드 1169)으로 입찰참가자격을 등록한 자

․ 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 또는「지방자치단체출연 연구원의 설립 및 운영에 관한 법률」에 따라 설립된 하천수질관련 연구기관

․ 민법 제32조 규정에 의해 설립․허가된 비영리법인인 하천수질관련 학회 또는「고등교육법」에 의한 대학·대학교 등 교육기관(부설연구소, 산학협력단 포함)

❍ 공동수급체 분담비율

계(%)	기술분야 (건설,환경부문)	연구분야
100	70	30

□ 제안서 평가

❍ 평가위원회 구성

- 서울특별시 제안서평가위원회 설치 및 운영에 관한 규칙에 의거 공무원 및 연구관련 분야 외부전문가 등 7인 이상 10인 이내로 구성

- 기술능력평가(연구 제안서 평가) 수행

❍ 평가항목 및 배점

- 기술능력평가 : 90점(정량적 평가 20점, 정성적 평가 70점)

- 입찰가격평가 : 10점

※ 종합평가 점수 산출 : 기술능력평가 점수 + 입찰가격평가 점수

❍ 평가방법

- 기술능력평가(정량) : 담당자가 심사기준에 따라 평가

- 기술능력평가(정성) : 평가위원회 심사위원이 평가(항목별 상대평가)

- 가격평가 : 가격평가 평점산식에 의해 평가

※ 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(안행부 예규) 적용

4		향후계획

□ 사전규격 공개 : ‘20.3.

□ 발주공고 의뢰 : ‘20.4.

□ 입찰 및 제안서 접수 : ‘20.4.

❍ 제안서 평가위원회 구성 : ‘20.4.

□ 제안서 평가위원회 개최 : ‘20.4.

□ 용역계약 및 수행 : ‘20. 5 ∼ ‘21.10.

붙임  1. 과업내용서 1부.

2. 산출내역서 1부.

3. 제안요청서 1부.  끝.