문서번호	재생정책과-4433
결재일자	2020.3.23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	광화문광장관리팀장	재생정책과장
방기환	황향선	03/23 백운석

19~20년 광화문광장 제설작업 용역

설계 변경 및 정산 보고

2020. 03.

도시재생실

(재생정책과)

19~20년 광화문광장 제설작업 용역

설계 변경 및 정산 보고

광화문광장 제설작업 용역이 강설량 감소에 따라 물량 감소분에 대하여 설계 변경하고 정산 보고 함.

□ 용역개요

○ 건    명 : 19~20년 광화문광장 제설작업 용역

○ 계 약 자 : 주식회사 도수건설(대표 ***)

○ 계약금액 : 금35,551,800원(금삼천오백오십오만일천팔백원)

○ 계약일자/완수일자 : 2019. 11. 6. ~ 2020. 3. 30.

□ 설계변경 내역 및 금액

○ 강설량 감소에 따른 물량 감소분

○ 설계변경 내역

공 종	수 량(%)		증․감	비 고
	당초	변경
제설작업, 제설장비 ․작업반장, 제설작업원, 제설대기, 제설장비 운전원, 1톤 트럭	100%	32%	감62%	강설량 감소분

○ 설계변경 금액

구 분	당 초(원)	변 경(원)	증․감(원)	비 고
총 용역비	35,551,800	11,341,000	감24,210,800	강설량 감소

□ 향후 추진계획

○ 물량 감소분 정산에 따른 설계변경 사항으로서 변경 계약 시행코자 함.

붙임  설계변경내역서 및 합의각서 각 1부.  끝.