투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰

우리 본부에서 시행 중인 「돈의문 박물관마을 수직정원」의 준공기한 연기를 아래와 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 돈의문 박물관마을 수직정원 조성공사

2. 계약금액 : 1,044,899,000원

3. 공사기간 : 2019.11.11 ~2020.5.8

4. 계 약 자 : (유)연일종합조경 외 2

5. 준공기한 연기내역

1) 당초 : 2019.11.11 ~ 2020.5.8

2) 변경 : 2019.11.11 ~ 2020.6.18(증42일)

6. 연기사유 : 공사구간 내 지장물 이전 지연으로 인한 절대공기 부족으로 공사기간 연기

7. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

8. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 1. 준공기한 연기 방침서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 공문 및 합의각서 각 1부.  끝.

	방재시설부장
주무관	손병도		공원시설과장	이병호		방재시설부장	전결 03/25 박홍봉
협조자	주무관	김희숙
시행	방재시설부-4449	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부	/
전화	02)3708-8732	/전송	02)3708-8756	/	daejin15@seoul.go.kr	/	부분공개(5)