“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	암사아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(2차1회, 총차3회) 시행[2019년 수배전반(고압기동반)외 1종 제작구매 설치]

우리 정수센터에서 장기계속계약으로 시행 중인 『2019년 수배전반(고압기동반)외 1종 제작구매 설치』에 대하여 아래와 같이 설계변경계약을 시행코자 합니다.

가. 계 약 명 : 2019년 수배전반(고압기동반)외 1종 제작구매 설치(2차)

나. 계약기간 : 2020. 01. 01. ~ 2020. 03. 31.(총차 : 2019. 03. 05. ~ 2020. 03. 31.)

다. 계약금액 : 금50,557,900원(총차 : 금195,097,400원)

라. 도 급 자 : ******************

마. 하자기간 : 납품검사일부터 2년

바. 변경사유 : 물품 수량 변경 및 신규 품목 반영, 보험료 등 조정 반영

사. 설계변경 내역(※ 계약기간 변경 없음)                                【단위: 원】

구 분		당 초	변 경	증 · 감
합 계		195,097,400	172,820,500	감)22,276,900
도 급 비	1차(2019년)	144,539,500	144,539,500	-
	2차(2020년)	50,557,900	28,281,000	감)22,276,900

아. 귀책사유 : 암사아리수정수센터

자. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(214), 수선유지비(05)

〔전기설비 유지관리〕 [기추산번호 #7599, 감추산필: 2020.03.25]

붙임  1. 설계변경 내역서(2차1회 및 총차3회) 각각 1부.

2. 합의서(2차 및 총차) 각각 1부.

3. 보고서 및 검증확인서 각각 1부.  끝.

주무관	박희정		주무관	이은숙		정수시설과장	양영민		암사아리수정수센터소장	03/25 이철범
협조자	주무관	김희수		주무관	변민용		행정관리과장	김달호
시행	정수시설과-3689	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131 암사아리수정수센터 (암사동)	/
전화	02-3146-5774	/전송	02-3146-5707	/	pakei27@seoul.go.kr	/	부분공개(5)