문서번호	총무과-3578
결재일자	2020.3.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	총무과장	경영지원부장		서울시립미술관장
김종민	김기용	김윤규		03/26 백지숙
협 조
	전시과장		고원석
	주무관		신현성
	주무관		이호완

- 제로에너지건물(ZEB) 추진을 위한 -

난지창작스튜디오 냉난방기 교체 추진 계획

2020. 3.

서울시립미술관

(총무과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□	에너지절약을 통한 온실가스 감축
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□	국고보조사업 (지역에너지절약)
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

- 제로에너지건물(ZEB) 추진을 위한 -

난지창작스튜디오 냉난방기 교체 추진 계획

입주 작가의 창작활동을 지원하고 제로에너지건물(ZEB) 추진을 위한 난지창작스튜디오의 노후 냉난방기 교체 계획을 보고 드림.

□ 추진근거

○ ICT 기반 에너지효율화사업 3개년 추진계획(총무과-3948, 2019.4. 1.)

○ 난지창작스튜디오 제로에너지건물(ZEB) 추진계획(총무과-7916, 2019.7.19.)

□ 추진개요

○ 대상지 현황

위 치	연면적 (㎡)	전력사용량 (kWH)	온실가스 (tCO2)	비 고
난지미술창작스튜디오 (하늘공원로 108-1)	2,122	218,524	100.390	태양광 130KW, 지열보일러

○ 추진기간 : 2020. 3. ~ 10.

○ 추진방법 : 전문업체 용역을 통한 설계 반영

○ 추진내용 : 노후화된 냉․난방기를 고효율 냉․난방기(EHP)로 교체

□ 추진방향

○ 에너지 자립형 난지창작스튜디오 조성

○ 고효율 에너지절약형 냉․난방기 교체를 통한 입주 작가 창작활동 지원

□ 추진계획

○ 공사내용

공 사 명	사 업 내 용	비 고
냉난방기 교체공사	∙ A동(노후 EHP → 고효율 EHP) ∙ B동(지열 냉난방시스템 → 고효율 EHP)
전 기 공 사	냉난방기 교체에 따른 전기설비 추가 및 교체
건 축 공 사	냉난방기 교체에 따른 텍스 교체 등

○ 소요예산 : 총250백만원(국비 75백만원, 시비 175백만원)

구 분	예 산(천원)	산 출 내 역	예 산 과 목
합 계	250,000
기술용역(실시설계)	20,000	실시설계 × 1식	서울시립미술관 에너지효율화사업, 시설비 및 부대비, 시설비
물품(냉난방기) 구매	230,000	물품구매 및 공사 × 1식
전 기 공 사
건 축 공 사

□ 행정사항

○ 추진일정

- 2020. 3.       : 사업 추진계획 수립

- 2020. 3. ~ 4. : 기술용역(실시설계) 실시

- 2020. 5. ~ 9. : 사업발주(물품구매, 관련 공사 등)

- 2020. 10.      : 사업 준공

○ 협조사항

- (전시과) 공사내용 난지창작스튜디오 입주 작가에게 사전 통보

참  고 : 제로에너지건물(ZEB) 개념도 1부.  끝.

참고) 제로에너지건물(ZEB) 개념도

	□ 제로에너지건물(Zero Energy Building)이란?
￭ 단열성능을 극대화하여 건축물 에너지 부하를 최소화하고(패시브) 태양광 등 친환경 신재생에너지를 활용하여(액티브) 건물 기능을 위한 에너지 소요량을 최소화하는 건축물