문서번호	자연생태과-7040
결재일자	2020.3.24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	산림이용팀장	자연생태과장
임성수	김상국	03/24 안수연

『바람길숲 조성 기본 및 실시설계용역』

중간보고(1차) 회의결과 및 공기연장 보고

2020. 3.

푸른도시국

자연생태과

『바람길숲 조성 기본 및 실시설계용역』

중간보고(1차) 회의결과 및 공기연장 보고

바람길숲 조성 기본 및 실시설계용역 중간보고(1차) 회의를 진행하고 그 결과 및 공기연장 계획을 아래와 같이 보고드림.

1. 일    시 : ***************************

2. 장    소 : ************

3. 참 석 자 : 11명

**********************************

*********************************************************

4. 보고내용

- 찬공기 유동분석 시뮬레이션(KLAM_21)에 따른 바람길숲 대상지 선정근거

- 바람길숲 유형별 조성·관리모델 확립

- 바람길숲 기본설계(안) 보고 : 사업대상지별 개요 및 유형별 설계

- 실시설계 대상지 선정을 위한 자치구 협의(2차) 결과 보고

	< 용 역 개 요>
○ 용 역 명 : ｢바람길숲 조성 기본 및 실시설계용역｣ ○ 용역기간 : 2019. 7. 5. ~ 2020. 5. 9.(10개월) ○ 용 역 비 : 885,000천원 ○ 과업내용 : 외곽산림, 하천변, 가로변, 공원·녹지 및 미기상 조사 분석 등 바람길숲 조성 기본구상 / 바람길숲 조성 기본 및 실시설계 관련 전문가 및 산림청 자문회의, 관련 인허가 및 건설기술심의 등 수행 ○ 대 상 지 : 관악산 안양천 일원(금천,구로,양천,영등포), 북한산 중랑천·우이천 일원(강북,도봉) ○ 계약업체 : ㈜선진엔지니어링종합건축사사무소, 제이케이그룹(주)

5. 회의내용

	사업대상지 선정 관련

․ 대상지별 쟁점사항을 정리하여 관련 부서 및 자치구와 협업 필요

*************************************************************************************************************

***************************************

**********************************************************************************************************************************

*****************************************

․ 산림청의 ‘도시숲’ 정의에 따른 대상지 선정 검토

**********************************************************************************

****************************************************************************************************

*******************************************

************************************************************************

***********************************************

	수종 선정 관련

․ 계획수종은 ‘서울시 미세먼지 저감을 위한 권장수종’ 반영

	대상지 선정을 위한 자치구 협의 결과(붙임2)

․ 기본계획에서 제시한 단계별로드맵에 따라 1단계 및 2단계 중 이견 없이 협의 완료된 실행가능한 부분을 우선하여 실시설계에 반영함

▸ *************************************************

******************************************************

*****************************************************************************************************

6. 검토의견

	사업대상지 선정 관련

******************************

▸ ***********************************************************************************************

********************************************

****************************************

**********************************************************************************************************************************************************

**********************************************************************************************************

	설계용역 추진일정 관련

․ 추진현황

▸ 2019.07.05.         : 용역계약

▸ 2019.07.29.         : 착수보고회

▸ 2019.08.             : 바람길숲에 적합한 산림표본조사 및 현황분석

▸ 2019.08.28.~11.08.  : 찬공기 생성지역 및 유동성 분석(KLAM_21 시뮬레이션)

▸ 2019.11.27.         : 자치구 설명회(양천, 영등포, 구로, 금천, 도봉, 강북)

▸ 2020.02.28.~03.16.  : 사업대상지 적정성 여부 등 자치구 의견조회

▸ 2020.03.17.         : 1차 중간보고(용역 진행사항 보고)

․ 향후일정

▸ 2020.03.24.~04.01.  : 전문가 자문(산림청 도시숲 조성관리 자문위원 - 개별, 서면)

※ ‘코로나19’ 관련 정부 권고에 따라 전문가 자문은 서면으로 진행

▸ 2020.04.03.~04.08.  : 전문가 자문결과 반영 중간보고자료 작성 및 내부보고

▸ 2020.04.09.~05.28.  : 설계경제성(VE) 검토

▸ 2020.05.28.~06.26.  : 건설기술심의

▸ 2020.06.29.~07.15.  : 계약심사

▸ 2020.07.16.~07.31.  : 설계용역 준공

․ 설계용역 준공기한 연기 검토

▸ 변경사항

구 분	당 초	변 경
용역기간	2019.07.05.~2020.05.09.	2019.07.05.~2020.07.31.

▸ 연기사유

· 향후 추진일정상 전문가 자문결과 반영한 중간보고자료 작성 및 내부검토, 설계경제성(VE) 검토, 건설기술심의, 계약심사 등 추진에 일정기간 소요로 공기 내 준공이 어려우므로 과업 수행의 원활한 추진을 위하여 부득이 공기를 연장하고자 함.

▸ 귀책사유 : 서울특별시

▸ 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 1. 자치구 협의(2차) 조치계획서 1부.

2. 중간보고(1차) 회의록 1부.  끝.