문서번호	주거환경개선과-4132
결재일자	2020.3.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
실무사무관		주거환경계획팀장	주거환경개선과장
이시우		박세진	전결 03/25 김장수
협조

- 독산1동 복숭아마을 주민공동이용시설 및 기반시설 -

설계용역비 예산 재배정 계획

2020. 3.

주거환경개선과

- 독산1동 복숭아마을 주민공동이용시설 및 기반시설 -

설계용역비 예산 재배정 계획

금천구 ‘독산1동 복숭아마을 관리형 주거환경개선사업’의 주민공동이용시설 및 기반시설의 설계용역 추진을 위하여 자치구에 예산 재배정하여 업무추진에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		대상지 개요 및 추진경위

□ 대상지 개요

○ 위    치 : 금천구 독산1동 147-20 일대

○ 면    적 : 35,308㎡

○ 용도지역 : 제2종일반주거지역, 준주거지역

○ 주민 및 가구 : 121동, 248세대

□ 추진경위

○ ’17.06.01. : 정비계획 수립용역 계약 및 착수

○ ’17.09.08. : 복숭아마을 현장거점 설치

○ ’17.10.31. : 주민설명회, 주민워크숍(총12회 진행)

○ ’19.02.28. : 정비계획 공람공고

○ ’19.3~4월 : 서울시 주거환경관리자문단 자문(2회)

○ ’19.05.04. : 정비계획(안) 재 공람공고

○ ’19.07.01. : 구의회 의견 청취

○ ’19.09.20. : 앵커시설 건립부지 매입계획 수립

○ ’20.02.11. : 기술용역 타당성 심사

○ ’20.02.14. : 금천구 설계용역비 예산재배정 요청**********

○ ’20.02.19. : 정비계획(안) 도시계획위원회 심의(조건부가결)

Ⅱ		용역 개요

□ 용역명

○ 주민공동이용시설 기본 및 실시설계 용역

○ 기반시설 실시설계 용역

□ 대 상 지

○ 금천구 독산동 149-61(주민공동이용시설)

○ 독산동 147-20번지 일대(35,308㎡)

□ 용역내용*******************)

○ 주민공동이용시설 기본 및 실시설계 용역*************

○ 기반시설 실시설계용역*************

□ 용역기간 : 2020. 4. ~ 8.

Ⅲ		재배정 및 향후계획

□ 재배정 사항

○ 사 업 명: 주민공동이용시설 기본 및 실시설계 용역 및 기반시설 실시설계 용역

○ 재배정액 : ************

○ 재배정처 : 금천구청 도시재생과

- 예산과목 : 도시재생실 주거환경개선과, 평생살고싶은마을만들기 추진, 주거지 재생사업 추진, 관리형 주거환경개선사업, 시설비

○ 검토결과

- 상기 재배정액은 금천구 독산1동 복숭아마을 관리형 주거환경개선사업 구역 내 주민공동이용시설 기본 및 실시설계 용역 및 정비기반시설 실시설계 용역비로서 금천구청장에게 재배정하고자 함

○ 주요 교부조건

- 금천구 독산1동 복숭아마을 관리형 주거환경개선사업 구역 내 주민공동이용시설 및 기반시설 설계용역 외의 다른 용도로 사용할 수 없음

- 서울특별시장은 사업 수행에 필요하다고 인정할 경우 본 사업에 대한 수행명령 또는 시정명령을 할 수 있으며, 구청장은 특별한 사정이 없는 한 이에 적극적으로 응하여야 함

- 재배정금은 집행완료 후 소정기일 내 관계증명서를 첨부하여 정산 보고하여야 함

□ 향후계획

○ ’20. 3월 : 주민공동이용이설 기반시설 설계용역 발주

○ ’20. 4월 : 설계용역 착수

○ ’20. 8월 : 설계용역 준공

붙임 1. 시비재배정 교부 결정서 1부.

2. 재배정 요청 공문(금천구) 1부.

3. 용역비 산출내역서(기술용역타당성 심사결과서) 각 1부.  끝.