“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	암사아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(암사아리수정수센터 시설물 정밀안전진단 용역)

우리 정수센터에서 시행하고 있는 「암사아리수정수센터 시설물 정밀안전진단 용역」에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 암사아리수정수센터 시설물 정밀안전진단 용역

나. 용역기간 : 2019. 3. 7. ~ 2020. 3. 31.

다. 용 역 사 : ㈜한국시설안전연구원(대표 안평기), ㈜한국국토안전연구원(대표 오성균)

라. 용역금액                                                        (단위: 원)

구 분	당초금액	변경금액	증,감
용역비	***********	***********	**********

마. 설계변경 사유 : 건설기술심의(제233차) 결과 “재심의” 의결에 따른 추가과업 수행으로 용역비 증가

바. 예산과목

- 정수비,수선유지교체비,수선유지비,(시설물 정밀안전진단 용역) : 당초 340,128,000원

- 정수비,수선유지교체비,수선유지비,(토목건축 시설물 유지관리) : 증액 60,100,000원

[추산필: 2020.03.24. #7533]

붙임  1. 설계변경 관련자료(계약금액조정검토결과서, 설계내역서)

2. 설계변경 검토보고 1부.  끝.

주무관	양봉우		주무관	이은숙		정수시설과장	양영민		암사아리수정수센터소장	03/25 이철범
협조자	주무관	변민용
시행	정수시설과-3665	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 아리수로 131	/
전화	3146-5776	/전송	3146-5707	/	ybw13@seoul.go.kr	/	부분공개(5)