문서번호	정수시설과-3836
결재일자	2020.3.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
박희정		양영민	03/27 이철범
협 조
	주무관			김희수

『2019년 일반전기설비 유지보수공사(장기계속)』

설계변경(총차_2회 및 2차_1회) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 03.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

『2019년 일반전기설비 유지보수공사(장기계속))』

설계변경(총차_2회 및 2차_1회) 검토 보고

장기계속 공사로 시행 중인 일반전기설비 유지보수 연간단가 공사에 대해 작업지시에 따른 시공물량 반영 및 보험료 등 정산 설계변경 보고임

		공사 개요

○ 공 사 명 : 2019년 일반전기설비 유지보수공사(2차)

○ 계약금액 : 금52,249,471원(총차 261,143,000원)

○ 공사기간 : 2020.01.01.~03.31.(총차, 2019.04.01.~2020.03.31.)

○ 계 약 자 : *******************

		설계변경 사유

○ 작업지시에 의한 물량 및 1차 계약 미반영분 적용, 2차 보험료 등 정산 설계변경

		관련 근거

○ 2019년 일반전기설비 유지보수공사 작업지시(1차 4회 및 2차 1회)

○ 지자체 입찰 및 계약집행 기준(제13장 공사계약일반조건, 제6절 공사설계의 변경)

		설계 변경

○ 공사비 변경 현황(※상세변경내용은「설계변경내역서」 참조)

구 분	계약금액(원)				증·감 (원)
	당 초		변 경
총공사비	261,143,161		245,004,000		감)16,139,161
	1차(2019년)	2차(2020년)	1차(2019년)	2차(2020년)
재 료 비	46,672,641	10,650,743	46,672,641	4,722,112	감) 5,928,631
노 무 비	103,033,119	24,154,495	103,033,119	20,035,142	감) 4,119,353
경 비	13,143,650	5,804,768	13,143,650	3,008,827	감) 2,795,941
기 타	46,044,280	11,639,465	46,044,280	8,344,229	감) 3,295,236
소 계	208,893,690	52,249,471	208,893,690	36,110,310	감)16,139,161

○ 정산대상 보험료 등 변경내용(2차)

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	증 감(원)
산 재 보 험 료	905,792	751,316	감) 154,476
고 용 보 험 료	210,143	174,305	감) 35,838
국민건강보험료	824,335	-	감) 824,335
국민연금보험료	1,148,456	-	감)1,148,456
노인장기요양보험료	70,150	-	감) 70,150
산업안전보건관리비	696,800	696,800	-
합 계	3,855,676	1,622,421	감)2,233,255

		조치 의견

○ 상기와 같이 2차 1회 작업지시분과 1차 4회 작업지시의 1차 계약 미반영분을 반영하여 붙임과 같이 설계변경계약하여 준공코자 하며, 보험료 등은 납부실적을 제출받아 정산코자 함.

붙 임 : 1. 작업내역서(총회) 1부.   2. 설계변경내역서(총차 및 2차) 1부.   3. 원가검증확인서 1부.  끝.