투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	관급자재(레미콘) 납품기한 연장요청(스페이스 살림 조성공사)

1. HTSC 2003-44호(2020.3.27.) 관련입니다.

2.『스페이스 살림 조성공사』의 관급자재(레미콘) 납품기한을 아래와 같이 연장요청합니다.

품명	납품업체 (납품요구번호)	규격	수량 (m3)	납품기한		비고
				당초	변경
레미콘	서울경인레미콘공업(협) ㈜정선레미콘 (12-19-1-45260-00)	25-18-80	200	2020.3.31.	2020.7.31.
	서울경인레미콘공업(협) ㈜진영기업 (12-19-1-45260-00)	25-18-80	292
		25-21-120	49
	유진기업㈜ (12-18-1-94273-00)	25-18-80	28
		25-18-120	650
		25-21-120	555
		25-21-80	2,572
	쌍용레미콘㈜ (12-18-1-94274-00)	25-18-120	650
		25-21-120	553
		25-21-80	2,570
	한일시멘트㈜ (12-18-1-94275-00)	25-18-120	650
		25-21-120	553
		25-21-80	2,570

*****************************************

붙임  변경계약 요청 공문 1부.  끝.

	건축부장
주무관	김민희		건축관리과장	차무흥		건축부장	03/27 임인구
협조자
시행	건축부-5538	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02)3708-2659	/		/	부분공개(5)