등록번호

교육아동청소년과-6243

주무관

돌봄지원팀장

교육아동청소년과장

★생활복지친화국장

등록일자

2020.3.24.

이나리

이수정

김송희

전결 03/27

김종석

결재일자

2020.3.27.

공개구분

대시민공개

협조

주무관

강한들

건축과장

이두수

주무관

백호선

주무관

정욱

건축시설팀장

이종권

서울광희초「중구형 돌봄교실」조성공사 계획

생활복지친화국

교육아동청소년과

서울광희초「중구형 돌봄교실」조성공사 계획

우리구와 중부교육지원청 및 광희초 간 업무협약에 따라 구에서 직영하는 학교안 돌봄교실을 새롭게 조성하여 질 높은 돌봄서비스를 제공하고자 함

Ⅰ	추진근거

□ 아동복지법 제4조(국가와 지방자치단체의 책무)

□ 서울특별시 중구 아동친화도시 조성에 관한 조례 제6조

(아동친화적 공간 및 시설)

□ 학교시설을 활용한 「중구 모든아이 돌봄교실」운영 업무협약

´2019. 10. 30.

Ⅱ	공사개요

□ 공사범위 : 광희초 수련교육지원본부 1, 2층(282㎡)

□ 공사기간 : 2020. 4. ~ 2020. 10.(설계포함)

□ 공사내용

- 현재 서울시교육청 수련교육지원본부로 사용하고 있는 생활관

1,2층을 돌봄교실(2실)로 조성

- 교실, 화장실, 계단 등 리모델링

- 급·배수, 씽크대, 냉·난방설비, 온돌마루, 조명 교체, 도기 교체 등

〔광희초 공사범위〕

1층
2층

Ⅲ	소요예산

□ 예산액 : 221,170천원

□ 산출내역

- 설계비 : 21,170천원

- 공사비 : 200,000천원

□ 예산과목 : 교육아동청소년과, 빈틈없는돌봄, 아동행복실현, 아동복지

증진, 중구모든아이돌봄사업, 시설비및부대비, 시설비

Ⅳ	계약방법

□ 설계 : 1인견적 수의계약

□ 공사 : 경쟁입찰 계약

Ⅴ	향후계획

□ 설계용역 계약심사 : ´20. 3. 31. 한

□ 설계 발주 : ´20. 4. 3. 한 (교육아동청소년과)

□ 설계 착수 : ´20. 4. 8. 한 (설계시 건축과 협조)

□ 설계용역 준공 : ´20. 6. 8. 한 (내역검토 건축과 협조)

□ 공사 발주 및 시공사 선정 : ´20. 7. 8. 한

□ 공사 착공 : ´20. 7. 15. 한

□ 공사 준공 : ´20. 10. 15. 한.  끝.