문서번호	정수시설과-800
결재일자	2020.3.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
김현철		代김현철	03/30 이달영
협 조

2019 전기공사(연간단가-2차분)

전기설비 유지보수공사 설계변경 시행계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 3.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

2019 전기공사(연간단가-2차분)

전기설비 유지보수공사 설계변경 시행계획 보고

우리 정수센터 전기설비 유지보수공사(연간단가) 시행 중 계약 물량의 증․감 사항이 발생하여 아래와 같이 설계변경(정산) 시행코자 보고 드림

□ 공사개요

○ 사 업 명 : 2019년 전기설비 유지보수공사(2차분)

○ 사업기간 : 2020. 1. 1 ~ 2020. 3. 31

○ 계약금액 : 금4,143,000원(총차: 61,443,000원, 1차: 57,300,000원)

○ 계 약 자 : 탑인더스트리(주)   대표 이정임

○ 계약내용

- 강제 및 플렉시블 전선관 등 배관공사 1식

- LED 조명 교체 및 기타 배선공사     1식

□ 설계변경 내용 및 사유

○ 신규공종 발생

- 형광램프 교체시 LED 램프 구동 컨버터(안정기) 교체 품 발생

- 야간에 이산화탄소 저장소 밸브 조작을 위한 보안등 설치

○ 내역물량 증감 발생

- 케이블 포설 및 LED 조명등 교체 물량 감소

○ 변경 사유

- 전기설비유지관리 점검보고 : 정수시설과-395(2020.02.20.)

- 기타 현장여건 변경에 따른 설계변경

○ 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료 등 미사용으로 감액

○ 주요 변경내역

명 칭	규 격	수 량		비고(증·감)
		당 초	변 경
보안등 설치	SUS 4M, LED 50W	0	2	증 2
컨버터 교체	DC 32V 570mV 18W	0	38	증 38
강재전선관	아연도 22 mm	0	18	증 18
케이블(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 3C 4㎟	4	27	증 23
	0.6/1kV F-CV 1C 95㎟	64	0	감 64
LED 조명등 교체	LED 12W - 직관형	7	0	감 7

○ 금액 변경                                                (단위 : 원)

구 분	총 차		1차	2차		증감
	변경 전	변경후	변경없음	변경 전	변경 후
공급가액	55,857,274	56,636,366	52,090,910	3,766,364	4,545,456	779,092
부가세	5,585,726	5,663,635	5,209,090	376,636	454,545	77,909
총공사비	61,443,000	62,300,000	57,300,000	4,143,000	5,000,000	857,000

○ 단 가 적 용

- 신규공종 : 산출단가에 계약시 적용된 낙착율을 곱한 단가 적용

- 물량증가공종 : 계약단가 적용

□ 조치의견

○ 위 변경 내용에 대하여 자체 설계변경 심의 위원회를 개최하고 심의 결과에 따라 설계변경 시행코자 함

○ 설계변경심의 위원회

- 일 시 : 2020.3.31.(화) 09:30~

- 장 소 : 정수시설과 사무실

- 심의사항

‣ 설계변경의 타당성

‣ 제경비 산정 및 적용 적정성 여부

‣ 물량변동의 적정성 여부

‣ 각종 제반 규정 준수여부 등

- 위 원

구 분	직 급	성 명	비 고
위원장	정수시설과장	*****
위 원	행정주사	*****
위 원	공업주사	*****
위 원	시설주사	*****
위 원	공업주사	*****
위 원	공업주사보	*****

붙임 1. 설계변경설명서 및 내역   각1부

2. 설계변경심의 의견서  1부.   끝.