투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	「국외 서울공원(카이로) 정비공사」설계변경(2차) 시행 및 계약변경 의뢰

1. 시설과-383(2019.3.4.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 추진 중인 『국외 서울공원(카이로) 정비공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경하여 공사추진하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 국외 서울공원(카이로) 정비공사

나. 도 급 액 : 금133,438,000원

다. 공사기간 : 2018.9.14. ~ 2019.3.10.

라. 도 급 자 : ***************

마. 공사비 변경내역

(단위 : 원)

구 분		공 사 금 액			비고
		당 초	변 경	증 감
총공사비		132,266,000	138,579,000	6,313,000
도급비	공급가액	132,266,000	138,579,000	6,313,000
	부가가치세	0	0	0
	소 계	132,266,000	138,579,000	6,313,000

바. 예산과목 : 공원조성과, 생활권 공원확충, 노후공원 재조성, 국외 서울공원 관리실태 점검 및 정비, 시설비및부대비, 시설비(401-01)

사. 공사기간연장 : 해당없음

붙  임 : 1. 설계 변경 보고서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 계약금액조정 검증확인서 1부. 끝.

	시설과장
주무관	김재희		공원조성팀장	김정미		시설과장	03/05 진병규
협조자	재무팀장	곽선아
시행	시설과-396	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33	/
전화	02)2181-1156	/전송	02)2181-1169	/	jh116@seoul.go.kr	/	대시민공개