문서번호	시설과-440
결재일자	2019.3.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	공원조성팀장	시설과장
김재희	김정미	03/08 진병규
협 조

「서울숲 무장애 친화공원 조성공사」

실정사항 검토보고

2019. 3.

동부공원녹지사업소

(시  설  과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

「서울숲 무장애 친화공원 조성공사」

실정사항 검토보고

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서울숲 무장애 친화공원 조성공사

○ 도 급 액 : 금731,450천원(이월)

○ 공사기간 : 2018. 12. 17. ~ 2019. 4. 15.

○ 도 급 자 : 신평산업(주) 대표 이석연

○ 공사내용 :  경사데크, 점자블록 설치, 포켓쉼터조성, 무장애 놀이터확충,

음수대 교체, 통합안내 시설설치, 화장실 내부 시설개선 등

□ 실정사항 내용

○ 서울숲 과학문화미래관 유치 및 삼표레미콘 이전 추진 등 서울숲 공원의 내․외적 변화에 부응하고 미래도시 변화에 대비하여 서울숲의 역할과 운영 전략수립을 위한 「서울숲의 미래상 설정 및 조성운영 기본계획 수립 용역」을 추진중으로,

○ 무장애 친화공원 조성공사 대상 시설과 용역에서 주요공간별 계획과 중복되지 않도록 서울숲 공원 마스터 플랜확정시 까지 공사 추진 기간 연장

⇨ 관련근거 : 시 공원녹지정책과-2302(2019.2.8.)호

○ 공사감독기관인 서울시설공단를 통해 시공사에 별도 지시일까지 공사 중단 통보

⇨ 관련근거 : 시설과-229(2019.02.11.)호 및 서울시설공단 공사감독3처-925(2019.02.27.)

□ 기간연장

○ 당  초 : 2018. 12. 17. ~ 2019. 4. 15.

○ 변  경 : 2018. 12. 17. ~ 2019. 11. 30.

□ 검토의견

○ 「서울숲의 미래상 설정 및 조성운영 기본계획 수립 용역」계획안 확정 후 공사를 시행하기 위해 2019년11월30일까지 공사(관급자재 포함) 기간 연장하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 관련공문 1부.  끝.