“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	암사아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(2차1회, 총차2회) 시행[2019년 일반전기설비 유지보수공사]

우리 정수센터에서 연간 단가계약으로 시행 중인 『2019년 일반 전기설비 유지보수공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명: 2019년 일반 전기설비 유지보수공사(2차)

나. 공사기간: 2020. 01. 01. ~ 2020. 03. 31.(총차: 2019. 04. 01. ~ 2020. 03. 31.)

다. 계약금액: 금52,249,471원(총차: 261,143,161원)

라. 도 급 자: (주)영동테크윈  대표이사  모상신

마. 하자기간: 준공검사일부터 1년

바. 변경사유: 작업지시에 따른 공사 시공물량 반영 및 보험료 등 정산

사. 설계변경 내역(도급비)

【단위: 원】

구 분		당 초		변 경		증 · 감
도급비	총공사비	261,143,161		245,004,000		감)16,139,161
	소 계	1차(2019년)	2차(2020년)	1차(2019년)	2차(2020년)
		208,893,690	52,249,471	208,893,690	36,110,310	감)16,139,161
	취수비 (711)	48,045,690	18,525,411	48,045,690	7,694,310	감)10,831,101
	정수비 (712)	160,848,000	33,724,060	160,848,000	28,416,000	감) 5,308,060

아. 예산과목: 2차(2020년)

원수및취수비(711), 수선유지교체비(214), 수선유지비(05), 정수장 시설 유지보수(11202)

☞ 전기설비유지관리             [기추산번호 #8191, 감추산필: 2020. 03. 31]

정수비(712), 수선유지교체비(214), 수선유지비(05), 정수장 시설 유지보수(11202)

☞ 전기설비유지관리             [기추산번호 #8192, 감추산필: 2020. 03. 31]

붙임: 1. 설계변경내역서 각 1부,  2. 합의서 각 1부,  3. 보고서 1부,  4. 검증확인서 1부.   끝.

주무관	박희정		주무관	이은숙		정수시설과장	양영민		암사아리수정수센터소장	03/31 이철범
협조자	주무관	김희수		주무관	변민용		행정관리과장	김달호
시행	정수시설과-3899	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131 암사아리수정수센터 (암사동)	/
전화	02-3146-5774	/전송	02-3146-5707	/	pakei27@seoul.go.kr	/	부분공개(5)