실정보고 검토서

공사명

강남순환도시고속도로 4공구 건설공사

공사개요

· 위    치: 금천구 독산동~소하동 JCT

· 규    모: 폭4~8차로, 연장 2.48㎞

· 공사기간: ’01.12.29.~’20.5.31.

· 도 급 비: 202,020백만 원

· 시공사: 롯데건설(주)

· 감리단: ㈜서영엔지니어링

· 설계사: ㈜서영엔지니어링

실정보고 건명

금하지하차도 부체도로 옹벽 및 경관재 구조물 변경

실정보고

사유

- 금하지하차도 상부 부체도로와 사유지에 단차 발생으로 노면수 유입 등 민원해소를 위해 부체도로 계획고를 하향 조정

- 금하지하차도 박스 종점부에 경관재 구조물의 안전성 확보를 위해 벽체, 중분대 보강

건설사업관리단

검토의견

금하지하차도 부체도로 계획고 조정 및 경관재 구조물 변경에 대한 시공 수량 및 공사비는 적정함.

공기에 미치는 영향

(  -  )  개월

변경(안)

구분	당초	변경	비고(증감)
옹벽공	콘크리트타설 96m3 거푸집 310m2 철근가공 및 조립 8.138ton 강관비계 210m2	콘크리트타설 155m3 거푸집 452m2 철근가공 및 조립 11.588ton 강관비계 210m2	증) 59m3 증) 142m2 증) 3.450ton 증) 100m2
경관재	콘크리트타설 1,665m3 거푸집 2,156m2 철근가공 및 조립 0.181ton 강관비계 516m2 세라믹코팅 1,029m2 중앙분리대 11m2 -	콘크리트타설 1,670m3 거푸집 2,186m2 철근가공 및 조립 0.561ton 강관비계 556m2 세라믹코팅 1,182m2 - 케미컬앵커 94개소	증) 5m3 증) 30m2 증) 0.380ton 증) 40m2 증) 153m2 감) 11m2 증) 94개소
금액	387,100,000	413,900,000	증) 26,800,000

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 (    )

당초 사업비 범위내 시행가능 ( ○ )

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

추가 행정절차 이행 필요여부

- “해당 없음”

발주처

검토의견

금하지하차도 상부 부체도로 계획고 조정 및 지하차도 박스 종점부 경관재 설치에 따른 구조물 안전성 확보를 위한 실정보고 내용이 적정함

비 고

결재

담당

김구

과장

장수철

부장

03/31

김용제