문서번호	토목부-6520
결재일자	2020.3.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
김구		장수철	03/31 김용제
협조

현장사무실 운영 방안 검토 보고

【개봉고가 성능개선공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 3.

도시기반시설본부

토 목 부

현장사무실 운영 방안 검토 보고

【개봉고가 성능개선공사】

개봉고가 하부에 컨테이너를 설치하여 현장사무실로 사용하도록 되어 있으나 고가 철거, 설치에 따른 안전사고가 우려되므로 별도 사무실을 확보하고자 검토 보고 드림.

1		공사개요

❍ 위    치 : 개봉고가차도(구로구 개봉로 68~개봉로 124)

❍ 규    모 : 교량성능개선(DB18→24), 폭 18.8m, 연장 332m

❍ 총사업비 : 22,662백만 원(도급비 12,278백만 원)

❍ 사업기간 : ’19. 8. 12. ~ ’23. 4. 11.

❍ 감리단/시공사 : ㈜유신 외 2개사 / 홍익산업개발㈜ 외 1개사

2		보고내용

❍ 설계된 현장사무실은 컨테이너(12×3×2.6m, 2동)를 개봉고가 하부에 설치하여 사용하도록 되어있으나 개봉고가 바닥판, 거더 철거 및 설치에 따른 위험이 상존하고 별도 공사용지 확보가 어려우므로 건설사업관리단 사무실과 공사 현장사무실 확보를 위해 건물을 임차하여 실비 정산하도록 하고자 함.

❍ 수량 변경 현황

공 종	규격	단위	당초	변경	증‧감	비고
1. 부대공
- 현장사무실	12×3×2.6m	동	2	-	-2
- 가설창고	12×3×2.6m	동	1	1	-
- 품질시험실	12×3×2.6m	동	1	1	-
2. 제잡비 제외공종
- 사무실 임차	44	개월	-	44	44

❍ 공사비 증·감 현황

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
직접공사비	20,214	4,397	-15,817
제경비	3,936	857	-3,079
사무실 임차료	-	124,126	124,126
공급가액	24,150	129,380	105,230
V.A.T	2,415	12,938	10,523
도급비	26,565	142,318	115,753

3		조치의견

❍ 공사 현장사무실 확보를 위한 책임건설사업관리기술자의 실정보고는 적정하므로 승인 처리하고 추후 설계변경에 정산 반영하고자 함.

붙임  건설사업관리기술자 검토의견서 1부.  끝.