문서번호	정수시설과-808
결재일자	2020.3.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
김현철		조귀현	03/31 이달영
협 조

2019 전기공사(연간단가-2차분)

전기설비 유지보수공사 설계변경 심의결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 3.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

2019 전기공사(연간단가-2차분)

전기설비 유지보수공사 설계변경 심의결과 보고

우리 정수센터 전기설비 유지보수공사(연간단가-2차분) 시행 중 발생한 물량의 증․감 사항에 대하여 설계변경 심의를 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 공사개요

○ 사 업 명 : 2019년 전기설비 유지보수공사(2차분)

○ 사업기간 : 2019. 4. 1 ~ 2020. 3. 31

○ 계약금액 : 금4,143,000원(총차: 61,443,000원, 1차:57,300,000원)

○ 계 약 자 : 탑인더스트리(주)   대표 이정임

○ 계약내용

- 강제 및 플렉시블 전선관 등 배선공사   1식

- LED 조명 교체 및 기타 배선공사       1식

□ 설계변경 심의내용

○ 주요 변경내역

명 칭	규 격	수 량		비고(증·감)
		당 초	변 경
보안등 설치	SUS 4M, LED 50W	0	2	증 2
컨버터 교체	DC 32V 570mV 18W	0	38	증 38
강재전선관	아연도 22 mm	0	18	증 18
케이블(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 3C 4㎟	4	27	증 23
	0.6/1kV F-CV 1C 95㎟	64	0	감 64
LED 조명등 교체	LED 12W - 직관형	7	0	감 7

○ 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료 정산

○ 설계변경에 따른 변경계약 금액                       (단위 : 원)

구 분	총 차		1차	2차		증감
	변경 전	변경후	변경없음	변경 전	변경 후
총공사비	61,443,000	62,300,000	57,300,000	4,143,000	5,000,000	857,000

□ 심의결과

○ 설계변경의 타당성 : 타당함

○ 계약 변동(증․감)물량 적정 적용 여부 : 적정

○ 제잡비 산정 및 적용 적정성 여부 : 적정

○ 각종 제반 규정 준수여부 : 준수

□ 조치의견

○ 심의 결과에 따라 설계변경 시행코자 합니다.

붙임 1. 설계변경심의 의견서      1부

2. 설계변경내역             1부

3. 설계변경내역 검증확인서  1부.   끝.