코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 일시중지 알림

1. 재무과-47536호('19.9.17.), 도로계획과-4874호('20.3.31.)와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 추진 중인 「국립중앙의료원 진입로 개설 기본 및 실시설계 용역」에 대하여 다음과 같이 과업을 중지하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 국립중앙의료원 진입로 개설 기본 및 실시설계

나. 용 역 비 : 금605,485,000원

다. 계약업체 : 주식회사 천일(대표 김창욱) 외 3

라. 계약일자 : '19.09.17.

마. 계약기간 : '19.09.17. ~ '20.05.13.(1차분)   ※ 총완수일자 : '20.09.10.

바. 과업중지일자 : '20.03.31.

사. 과업중지사유 : *****************************

아. 과업중지기간 : 과업중지사유 해결시까지.  끝.

	도로계획과장
전문관	이승헌		간선도로계획팀장	김경호		도로계획과장	03/31 안대희
협조자
시행	도로계획과-4926	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 도로계획과 (태평로1가)	/
전화	02-2133-8077	/전송	02-2133-0763	/	sh0123@seoul.go.kr	/	부분공개(5)