문서번호	토목부-6517
결재일자	2020.3.31.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

					시 민
주무관	터널건설과장	토목부장	시설국장
이현국	최진우	김용제	03/31 박상돈
협 조

통합 건설사업관리용역 발주계획 보고

(세종대로 도로공간 재편사업 외 2개 건설공사)

2020. 03.

도시기반시설본부

( 토 목 부 )

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

- 세종대로 도로공간 재편사업 외 2개 건설공사 -

통합 건설사업관리용역 발주계획 보고

차량중심에서 사람중심의 ‘걷는 도시, 서울’ 조성을 위한 녹색교통진흥지역 내 도로공간 재편 및 광화문(도심)에서 한강까지 자전거 간선도로망 구축하는 「세종대로 도로공간 재편사업」 외 2개 공사의 통합 건설사업관리용역 발주계획을 보고 드림

Ⅰ		용 역 개 요

○ 용 역 명 : 세종대로 도로공간 재편사업 외 2개소 통합 감독권한대행 등 건설사업관리용역

○ 공사위치

- 세종대로 도로공간 재편사업 : 세종대로사거리~서울역교차로

- 을지로 도로공간 재편사업 : 시청역~동대문역사문화공원사거리

- 한강대로 자전거 간선도로망 구축사업 : 서울역교차로~숙대입구역~한강대교 북단

○ 공사규모

- 세종대로 도로공간 재편사업 : 양방향 8~12차로→6~9차로 축소, 보도확대 L=1.5km

- 을지로 도로공간 재편사업 : 양방향 6차로→4차로 축소, 보도확대 L=2.5km

- 한강대로 자전거 간선도로망 구축사업 : 양방향 2차로 축소, 자전거 전용도로 구축 L=4.2km

○ 총사업비

- 세종대로 도로공간 재편사업 : 18,290백만원 (보행정책과)

- 을지로 도로공간 재편사업 : 13,412백만원 (보행정책과)

- 한강대로 자전거 간선도로망 구축사업 : 3,628백만원 (자전거정책과)

*************************************************

******************************************

〈 위치도 〉

Ⅱ		추 진 현 황

□ 세종대로 도로공간 재편사업

○ '19.10.30. : 주민설명회(1차) 시행**************

○ '19.12.11. : 주민설명회(2차) 시행**************

○ '20.01.13. : 사업 시행 요청(보행정책과→도시기반시설본부)

○ '20.02.26.~'20.03.10. : 설계경제성(VE) 검토 시행

○ '20.03.19. : 교통안전시설규제심의 시행(서울지방경찰청)

□ 을지로 도로공간 재편사업

○ '18.09.18. : 주민설명회 시행*******************

○ '18.10.16. : 사업계획(사업시기) 조정

************************************

○ '19.12.20. : 디자인심의 완료

○ '20.01.13. : 사업 시행 요청(보행정책과→도시기반시설본부)

□ 한강대로 자전거 간선도로망 구축사업

○ '18.12. : 도심연결 자전거전용도로망 구축 기본 및 실시설계 완료

********************************************

○ ’19.01~02. : 기본 및 실시설계(용역준공 결과) 재검토, 현장점검.

*****************************************

○ ’19.03.~08. : 한강대로 기본설계안 변경

****************************************

○ ’19.09. : 전문가 자문회의 개최, 기본설계(안) 확정

○ ’19.10. : 서울지방경찰청 교통안전시설 규제심의 상정 및 협의 추진

- 서울지방경찰청 교통관리과 협의의견

********************************************

******************************************

***********************************************

○ ’20. 1. 3.: 공사 협조요청(자전거정책과→도시기반시설본부)

Ⅲ		예 산 현 황

○ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

****		***	****	****	***
****		*****	***	***
*****	****	***		***
	***	***		***	*********** **************** ********************
******	********	***	***

○ 부서별 예산과목

구 분		예 산 과 목	비고
보행정책과	세종대로 을지로	○ 도시교통실 보행정책과, 보행권 향상 및 교통약자 안전관리, 보행환경 개선(도시개발특별회계), 세종대로 도로공간 재편 / 을지로 도로공간 재편, 시설비 및 부개비, 감리비
자전거정책과	한강대로 자전거	○ 도시교통실 자전거정책과, 자전거이용 활성화 및 교통환경 개선(교통사업특별회계), 자전거 이용시설 확충 및 관리(교통관리계정), 도심연계 자전거 전용도로망 구축, 시설비 및 부대비, 감리비

Ⅳ		건설사업관리방식 검토

○ 관련근거

- 건설기술진흥법 제39조 및 동법 시행령 제55조, 시행규칙 제33조

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 【국토교통부 고시 제2018-385호】

○ 감독권한대행 등 건설사업관리 통합시행 검토 결과 : “통합시행”

- 공사의 공종이 유사하고, 공사현장이 인접한 경우에는 통합시행

· 통합하여 발주하는 공사 현장간 직선거리가 20km 이내임.

· 주요 공종이 도로축소, 보도확대, 자전거도로신설 등 유사한 공종으로 이루어져 있음.

○ 건설사업관리방식 적정성 평가 결과 : “감독권한대행 등 포함”

- 적정성 평가결과 : “71점”으로 감독권한대행 포함 건설사업관리방식 채택

***	****	**	**	*****
*******	*****	**	**	*************************************
	*****	**	*	*******************
	***	**	**
*******	****	**	*	*********************** *******
	****	*	*	***********************
	*******	*	*	*************** ********
	******	*	*	**************
	***	**	**
******	******	**	**	****
	***	**	**
******	***	**	**	******************
	***	**	*	**************
	***	**	**
****		***	**	*******************

< 관 련 규 정 >

□ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제7조

※ 평가점수에 따른 사업관리 방식

- 80점 이상 : 건설사업관리(감독권한대행 포함)  - 65점 이상 : 건설사업관리(감독권한대행 포함 가능)

- 50점 이상 : 건설사업관리(감독권한대행 불가)  - 50점 미만 : 직접감독

Ⅴ		발주방법 검토

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 세종대로 도로공간 재편사업 외 2개소 통합 감독권한대행 등 건설사업관리용역

*****************

********************

○ 용역내용 : 건설공사 전반에 대한 감독권한대행 등 건설사업관리용역

*****************

***************************************************

*************************************************

*****************

*************************************************

**********

******************************************************************************************

********************************************************************

*************************************************

*****************************************************

************************

****	****	****	**
*****	**	**

**********************************

******************************************************

***********

*************************************

*************************************

Ⅵ		향후 추진계획

○ '20.04. : 행정사항 조치

- 건설기술심의, 기술용역타당성심사, 일상감사 의뢰

- 건설사업관리용역 발주 의뢰 및 PQ심사

○ '20.05. : 용역 착수(공사 시기에 따라 변동 가능함)

붙임  1. 사업설명서 1부.

2. 과업내용서 1부.

3. 사업수행능력평가서 1부.  끝.