문서번호	하천관리과-5067
결재일자	2020.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	치수총괄팀장	하천관리과장		물순환안전국장
안덕용	함명수	한유석		04/01 이정화
협 조
	치수관리팀장		김서연
	치수설비팀장		이문주
	하천계획팀장		이승우
	하천생태팀장		권혁제
	주무관		조현범

자치구 주요사업 공정회의(간담회) 결과 보고

2020. 3.

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

자치구 주요사업 공정회의(간담회) 결과 보고

2020년 수방대책 및 하천분야 주요사업 추진에 철저를 기하고자 자치구별로 공정회의(간담회)를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

□ 공정회의(간담회) 개요

○ 기  간: 2020. 2.18.~ 3.20.

○ 장  소: 물순환안전국 하천관리과장실(8층)

○ 참  석: 하천관리과장, 치수총괄팀장, 치수관리팀장, 치수설비팀장,

하천계획팀장, 하천생태팀장, 자치구 담당과장 및 담당자

○ 안  건: 2020년 수방대책 및 하천분야 사업 79건

□ 주요내용

○ 풍수해 대비 추진하는 각종 점검․정비는 5월 15일 이전 완료

○ 하천에서 인명사고가 발생하지 않도록 자치구간 협조 및 운영 철저

- 하천순찰단 구성(운영), 위험지역 대피(과태료부과)표지판 설치, 진출입 차단시설 개별 방송시설 설치 등(5월 15일 이전 조치 완료)

○ 빗물펌프장 노후시설 교체는 우기 전 완료, 수문개폐 훈련 시 실제 개폐

○ 하천분야 사업

- 5~6월 완료 예정인 사업은 공정관리 철저

- 12월 완료 예정인 사업은 여름철 강우 대비 굴착구간은 우기전 안전조치 및  하천내 각종 적치물은 우기 전 반출 철저

○ 사업비 부족 등으로 추경이 필요한 사업에 대하여는 사전협의 및 추경사업비가 이월되지 않도록 자료 준비 철저

□ 조치계획

○ 금년도 사업 추진 시 반영 될 수 있도록 자치구에 통보

붙임: 자치구별 세부 검토내용 1부.  끝.

붙임		자치구별 세부 검토내용

연번	자치구	사 업 명	주요내용	비고
1	공통	․하천위기상황관리시스템 유지관리 ․하천 예경보시설 신설 및 교체 ․하천진출입차단시설 원격화	․기존 점검․정비는 5월 15일 이전 완료하고, 신설 시설은 늦어도 5월말까지 완료하여 여름철 운영에 차질이 없도록 할 것 ․인명사고 제로화를 위해 하천순찰단 운영방안 검토 ․경찰서와 협조체계를 구축하여 필요시 합동순찰 ․원격화된 진출입차단시설에는 차단 후 진입시 출입금지 안내방송이 될 수 있도록 보완 ․고립사고 우려지역에 대피 및 과태료부과 안내표지판 설치 ․자치구간 경계지점에서 사고 발생시 경계지점 확인 등으로 구조 등의 대응이 지연될 수 있으니 상호 협력체계를 구축하여 신속하게 대응 바람 (자치구간 카톡방 운영 등)
2	공통	․빗물펌프장, 수문 등 정밀안전진단 ․노후 수문, 배수설비, 수배전반, 제어설비 개량 ․수방용 양수기 관리	․노후시설 교체는 5월 15일 이전에 완료하여 수방기간 운영에 차질이 없도록 조치하기 바람 ․수문, 빗물펌프장 정밀안전진단(점검) 및 성능평가 결과는 반드시 FMS에 입력하기 바람 ․빗물펌프장 및 수문시설 시운전 점검을 철저히 하여 주시고, 육갑문 시운전은 교통 통제 후 실질적인 개폐가 될 수 있도록 하기 바람. ․주민대여 양수기 및 펌프장, 주민센터 보관 양수기에 대한 성능점검을 하여주시고, 특히 권역별 양수기는 상시 지원이 가능토록 별도 보관하여 주시기 바람
3	동대문구	․중랑천 저수호안 및 배수로 정비	․금년 5월말 완료 예정으로 공정관리에 철저를 기하고여름철 하천 유수소통에 지장이 없도록 하기 바람
		․정릉천 하상 세굴 및 침식복구(세굴방지) 공사	․금년 12월 완료 예정으로 여름철 대비 하류부터 공사 가능한 구간을 시행하여 강우 시 하천 사면 등이 손상되지 않도록 하기 바람 ․정릉천과 청계천 합류구간 악취에 대하여는 최소화 할 수 있는 방안 강구 바람(커튼막 설치 등)

연번	자치구	사 업 명	주요내용	비고
3	동대문	․하천 자전거도로 및 산책로 도로표지병 설치 ․정릉천, 성북천 저협수로 정비	․금년 5월말 완료 예정으로 공정관리에 철저를 기하고 여름철 하천 유수소통에 지장이 없도록 하기 바람
4	중랑구	․묵동천 생태하천 조성 사업	․사업비 부족으로 추경을 요청하고 있으나 대부분 계획보다 공정이 늦어 추경확보 후 이월하는 사례가 있으니 사전 협의 및 추경자료 준비 철저 ․공사로 인하여 여름철 피해가 발생하지 않도록 현장관리 철저
		․중랑천 둔치 저수호안 정비 ․중랑천 둔치 산책로 정비 및 휴게공간 조성	․금년 5월말 완료 예정으로 공정관리에 철저를 기하고, 여름철 하천 유수소통에 지장이 없도록 하기 바람
		․중랑천,면목천 합류부 교량하류 정비 ․중랑천 자전거 전용 트랙 및 안전체험교육장 조성	․금년 12월 완료사업으로 여름철 피해 없도록 현장관리 철저 및 하천에 설치되는 시설물에 대하여는 관리방안 검토
5	성북구	․우이천 복개구간 복원화 사업	․현재 기존시설물이 철거되어 사면이 노출된 상태이므로 우기전에 사면을 안정화하여 안전사고가 발생하지 않도록 사업추진 철저 ․부족예산 추경 요청 시에는 사전 협의 및 자료 준비 철저
		․중랑천 우이천 합류부 하상정비 및 개선 ․성북천 분수마루 정비공사	․금년 5월말 완료 예정으로 공정관리에 철저를 기하고, 여름철 하천 유수소통에 지장이 없도록 하기 바람
6	강북구	․우이천 쌍한교 재설치 공사	․가교, 임시우회도로 등이 유실, 유수 소통 장애 등으로 금년 10월부터 공사를 추진할 계획으로 ․부족 예산 추경 요청시에는 공정현황을 고려하여 이월되지 않도록 사전협의 및 자료 준비 철저
		․우이천 산책로 및 통학로 개선사업	․금년 6월 완료 예정이며, 하천 상단에 산책로를 시공하는 것으로 시공 및 지연되지 않도록 공정관리 철저
7	도봉구	․중랑천 자전거도로 정비 공사 ․중랑천 녹천교 주변 노후시설물 정비공사	․금년 12월 완료 예정으로 시공에 철저를 기하고, 여름철 안전사고가 발생하지 않도록 현장관리 철저

연번	자치구	사 업 명	주요내용	비고
7	도봉구	․방학천 옹벽 실시설계 용역 및 시설정비	․실시설계를 조속 완료하여 옹벽이 재설치 될 수 있도록 하고, 금년 여름철 대비 위험구간은 안전조치하기 바람
		․도봉1천 풍수해저감 공사	․보상업무 지연 등으로 사업이 늦어지고 있으니 금년에 사업이 완료될 수 있도록 최선을 다하기 바람
		․중랑천 물놀이장 조성공사	․물놀이장에서 사용한 물을 정화하지 않고 중랑천으로 방류할 경우 수질오염 등의 문제가 될 수 있으니 인근 차집관로로 배출하는 방안 등 검토
8	노원구	․중랑천 농구장 개선	․금년 6월 완료 예정으로 공정관리 및 탄성포장 시공관리에 철저를 기하고 및 향후 유지관리에도 만전을 기해주기 바람
		․우이천 자전거도로 및 산책로 정비	․자전거도로 확장으로 하천 통수단면이 축소되는 구간이 일부 있으니 유수소통에 지장 없는지 확인 후 추진하기 바람
		․당현천 불암교 하류 친수공간 정비	․하천내 분수 설치 시 강우로 인한 파손이나 유실 등의 유려가 있으니 시공 및 시설물 관리 철저
		․우이천 휴게공간 개선	․금년 6월 완료 예정으로 시공 및 공정관리 철저
		․당현천 성서대 앞 친수공간 정비	․금년 8월까지 계획되어 있으니 기한내 완료할 수 있도록 공정관리 및 여름철 강우로 인한 피해가 없도록 현장관리 철저
9	은평구	․불광천 지방하천 시설물 정비공사	․하천 준설, 제방정비 등은 여름철에 대비 우기전 시행 철저
		․불광천변(응암동)역류방지 배수문 설치	․하수관로 정비와 연계되는 사업이므로 금년 확보된 하수관로 정비사업은 침수위험지역부터 개선해 주기 바람
10	서대문	․홍제천 노후 자전거도로 및 산책로 정비	․금년 12월 완료 예정으로 하천내 현장관리 및 공정관리 철저
		․홍제천 폭포마당 및 노후 접근로 정비	․노후된 데크를 교체하는 사업으로서 데크 시공에 철저를 기하고 여름철 강우 대비 안전사고가 발생하지 않도록 현장관리 철저(12월 완료 예정)

연번	자치구	사 업 명	주요내용	비고
10	서대문	․홍제천 홍제교~홍은대교 간 물빛로드 조성	․금년 11월 완료 예정으로 시공에 철저를 기하고, 여름철 하천내 안전사고가 없도록 현장관리 철저
		․불광천(서대문구) 하천 및 시설물 정비	․우기전에 하상준설 등은 완료하여 하천 유수소통에 지장이 없도록 하고, 하천내 현장관리 철저
11	마포구	․홍제천, 불광천 안내체계 개선 사업	․서울시 기준 디자인으로 통일된 표지판을 설치하여 하천의 이미지를 통일화 하기 바람
		․홍제천,불광천 도로 표지병 설치	․하천 청소 시 등에 유실되지 않도록 시공 철저 및 표지병 조명시설 관리 철저
		․향동천 수변공간 개선	․금년 6월 완료 예정이며, 토사 유실 방지공사 및 초화류 식재 시공에 철저를 기하기 바람
		․홍제천 노후 시설물 정비 및 안전시설 설치	․금년 12월 완료 예정으로 시공 및 현장관리 철저
12	구로구	․하천진출입로 차단시설 설치 (구로구 도림천)	․1번 공통사항 참조
		․도림천(구로구) 자전거도로 및 보행로정비	․금년 6월 완료 예정으로 공정 및 현장 시공관리 철저
		․오류천 단면확장	․34개 침수취약 해소사업으로서 금년 여름철 침수피해가 최소화 되도록 우기전 완료 철저 ․단면 확장구간 도로침하가 없도록 시공 철저
13	금천구	․안양천(금천구) 산책로 및 자전거도로 정비	․금년 6월 완료 예정으로 공정 및 현장 시공관리 철저
		․박미 빗물펌프장 시설용량 증대	․상부 복합시설 활용계획 수립 시 에는 관련규정 절차 이행 철저(도시계획시설 중복결정 등) ․침사지 퇴적물 반출, 작업구, 점검통로 등 유지관리 시설에 대한 안전성 및 편의성을 고려하여 설치 하기 바람
14	영등포구	․도림천(영등포구) 문래 나들목 설치	․나들목 폭이 협소하여 자전거 이용자와 보행자간 안전사고 위험이 있으니 통행에 불편 없도록 운영하기 바람
		․도림천(영등포구) 자전거도로 및 보행로 정비	․자전거 도로를 평삭 후 포장하는 것으로 자전거 이용자 안전 및 현장 시공관리 철저

연번	자치구	사 업 명	주요내용	비고
15	동작구	․도림천(동작구) 야간경관 개선사업	․분수 및 경관조명시설 등은 강우 시 손상되지 않도록 시공관리 철저
		․흑석 빗물펌프장 이전 및 용량 증대 사업	․사업이 신속히 추진 될 수 있도록 토지분할 측량 등 토지보상 업무를 조속 추진하기 바람
16	관악구	․도림천(관악구) 복개철거 및 친수공간 조성	․여름철 호우에 대비 철거한 폐기물 및 자재 등은 우기전 반출 완료토록 현장관리 철저
17	서초구	․안골천 우수암거 단면확장 공사	․여름철 강우 대비 유출부 단면 축소구간은 우기전 확보하고, 사업비는 시․구 매칭 될 수 있도록 시비 대비 부족한 구비 신속 확보 바람
		․반포천(서초구) 자전거도로 설치	․우기 전 사업완료 될 수 있도록 공정관리 철저
		․사당역 일대 배수개선	․사업은 서초구에서 추진하고 있으나 동작구도 침수예방을 위해 필요한 사업이므로 상호 협조체계를 유지하고 동작구 의견을 적극 반영해 주기 바람
18	강남구	․탄천(강남구) 자전거 통행로 겸 보행교 신설	․사업 조기준공 및 원활한 예산집행 등을 고려하여 효과적인 공정관리를 검토하기 바람
19	송파구	․성내천 생태하천 조성 시범사업	․그동안 퇴적토 등으로 정체수 배수관로(고지배수로)를 점검하지 못하였으므로 금회 준설시행후 점검이 시행될 수 있도록 할것
		․성내천 산책로 환경정비	․금년 9월 완료 예정으로 여름철 하천내 적치물로 인한 침수피해가 없도록 현장관리 철저 ․노후 산책로 탄성포장 시공 철저
		․탄천 자전거 및 보행자 도로 정비	․산책로(데크) 시공 철저 ․자전거 경사로는 자전거 이용자의 안전사고를 고려하여 설치·운영 바람
		․탄천 접근로 교량 설치공사	․하천 시설물(제방,호안 등) 손실 최소화 등을 위해 사업 추진시 서울시와 지속적인 협의 필요
		․탄천 산책로 데크 및 진출입로 조성 ․탄천 송파둘레길 산책로 조성사업	․생태경관 훼손이 최소화 되도록 하고, 산책로 조성시 시공 철저

연번	자치구	사 업 명	주요내용	비고
19	송파구	․성내천(송파구) 유지용수 공급펌프 교체	․시공에 철저를 기하고, 설치 후 성능검사 (무부하 시험 등)을 하기 바람
		․성내천(송파구)조명시설 태양광 LED 가로등기구 교체 개량	․시공 및 태양광 LED 유지관리 철저
20	강동구	․성내유수지 정비	․유수지 저류용량을 충분하게 검토하기 바라며, 설계 및 착공 전 송파구와 충분히 협의하고 추진하기 바람 ※ 송파구 소유 / 강동구 관리
		․성내천 생태하천	․성내천 정체수 배제시설 설치 후 정체수 배제예정(‘20년 하반기 혹은 ’21년 상반기 예상)으로 송파구와 일정을 맞추어 고지배수로에 대한 안전점검 시행 할 것