투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(휴일작업 승인 통보)

1.업무지시현장 : 서울 공예박물관 조성 기계공사(장기1차) 주식회사거륜에너텍, 서울

공예박물관 조성 기계공사(장기1차) (주)무영씨엠건축사사무소

2.작 성 일 자 : 2020-04-01 09:04:02

3.지 시 내 용

가. 무영공예CM 제2020-96(2020.03.31.)호와 관련입니다.

나.‘서울공예박물관 조성 기계공사’ 휴일작업 승인요청 건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 공사장 안전관리에 만전을 기하여 주시길 바랍니다.

공종	작업일자	작업내용	작업자
기계 / 소방	4.4(토)	- 동관 지붕층 공조덕트 설치 - 관리동 수장고 디퓨져 설치 - 본관 공조기 냉매배관 - 본관 공조실 자동제어 노출배관 - 각 동별 옥내소화전함 전기소방 결선	- 관리자 : 1명 작업자 : 22명 감리자 : 1명
기계 / 소방	4.11(토)	- 동관 지붕층 공조덕트 설치 - 동관 각 층별 디퓨져 설치 - 동관 지붕층 공조기 냉매배관 - 본관동 공조실 자동제어 노출배관 - 각 동별 옥내소화전함 전기소방 결선	- 관리자 : 1명 작업자 : 22명 감리자 : 1명
기계 / 소방	4.18(토)	- 동관 지붕층 소음기 및 챔버 설치 - 각 동별 TPS실 소공간용 소화기 설치 - 본관 각 층별 디퓨져 설치 - 본관동 공조실 자동제어 케이블 입선 - 교육관 지붕층 실외기 냉매배관	- 관리자 : 1명 작업자 : 22명 감리자 : 1명
기계 / 소방	4.25(토)	- 각 동별 공조덕트 기구류 잔손보기 - 각 동별 화장실 전기온수기 설치 - 각 동별 소방전기용 감지기 설치 - 각 동별 공조기용 자동제어 센서 취부 - 교육관 지붕층 실외기 냉매배관	- 관리자 : 1명 작업자 : 22명 감리자 : 1명

끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							이지영			환경설비과장					04/01 김오열
협조자
시행			설비부-4742									(						)		접수											(						)
우	04520					서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8620						/전송			02-3708-8659					/													/	대시민공개