문서번호	시설보수과-3034
결재일자	2020.4.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	서부도로사업소장
전휘기		오재영	04/02 김영철
협조	주무관		권순회
	주무관		김종성

『금화터널 외 3개소 정밀안전점검 용역』

준공에 따른 유지관리 계획

2020. 04.

서부도로사업소

시 설 보 수 과

『 금화터널 외 3개소 정밀안전점검용역』

준공에 따른 유지관리 계획

우리사업소에서 시행한「금화터널 외 3개소 정밀안전점검용역」지적사항에 대한 보수 등 향후 조치 계획 보고임.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 금화터널 외 3개소 정밀점검용역

○ 용역기간 : 2019. 6. 3. ∼ 2019. 11. 29.

○ 용 역 비 : 125,085천원

○ 용 역 사 : ㈜한국건설방재연구원 대표 김영미

○ 대상시설

구조물명	위 치	연장(m)	준공년도	비 고
금화터널	서대문구 대신동∼서대문구 현저동	550.0	1973
봉산터널	은평구 신사동∼고양시 덕양구 향동동	475.0 495.0	2016
청계천복개(우안)	중구 수표동∼성동구 마장동	4,486	2016
충정교	서대문구 충정로	40.0	1979

□ 추진경위

○ 2019. 06. 03 : 용역 착수

○ 2019. 06. 26 : 착수보고

○ 2019. 06. ∼ 09. : 외관조사 및 재료시험 수행

○ 2019. 10. 15 : 중간보고

○ 2019. 10. 28 : 최종 자문회의

○ 2019. 11. 29 : 용역 준공

□ 용역결과

○ 결과요약

시설물명	주요 손상종류		보수 물량	보수보강 비용(백만원)
				계	1순위	2순위	3순위
금화터널 (B등급)	옹벽	- 균열(cw=0.3mm이상)	920m	54	-	-	54
		- 망상균열	4,308㎡	368	-	-	368
	총공사비 계(제경비 포함)			422	-	-	422
봉산터널 (B등급)	라이닝	- 망상균열(서울방향)	435㎡	37	-	-	37
		- 망상균열(고양방향)	1,014㎡	87	-	-	87
	총공사비 계(제경비 포함)			124	-	-	124
청계천복개 (우안) (B등급)	상부 슬래브 하면	- 보수부 망상균열	2,368㎡	593	-	593	-
	거더	- 박리박락	106㎡	47	-	47	-
	총공사비 계(제경비 포함)			640	-	640	-
충정교 (B등급)	받침장치	- 본체 부식	68개소	510	-	-	510
	바닥판	- 망상균열/백태	187㎡	47	-	47	-
	총공사비 계(제경비 포함)			557	-	47	510

○ 종합결론

- 금화터널(2종)

․점검결과 구조적 손상은 없으나 콘크리트 라이닝 망상균열, 백태 등에     대한 표면보수와 박리·박락, 파손 등에 대한 단면보수 등이며 이에 대한    지속적인 유지관리가 필요하고, 각 손상원인에 따라 보수를 실시하면    터널의 안전성, 사용성 및 내구성을 확보할 수 있을 것으로 판단됨.

- 봉산터널(2종)

․점검결과 구조적 손상은 없으나 콘크리트 라이닝 망상균열, 백태 등에     대한 표면보수와 박리·박락 등에 대한 단면보수 등이며 이에 대한     지속적인 유지관리가 필요하고, 각 손상원인에 따라 보수를 실시하면    터널의 안전성, 사용성 및 내구성을 확보할 수 있을 것으로 판단됨.

- 청계천복개(우안)(1종)

․점검결과 구조적 손상은 없으나 상부슬래브 하면 및 벽체, 기둥에서    조사된 망상균열, 백태, 철근노출, 콘크리트 박리·박락 등에 대한    보수와 받침장치 부식에 대한 도장보수 등에 대한 지속적인 유지    관리가 필요하고, 각 손상원인에 따라 보수를 실시하면 본 구조물의    안전성, 사용성 및 내구성을 확보할 수 있을 것으로 판단됨.

- 충정교(법정외)

․점검결과 구조적 손상은 없으나 바닥판 하면의 망상균열, 백태, 철근노출    등에 대한 단면보수와 스틸플레이트거더의 부식, 도장 박리부 도장보수,    받침장치 부식에 대한 받침교체 등이며, 이에 대한 지속적인 유지관리가    필요하고, 각 손상원인에 따라 보수를 실시하면 교량의 안전성, 사용성    및 내구성을 확보할 수 있을 것으로 판단됨.

□ 조치계획

○ 금화터널, 봉산터널

- 3순위 보수대상은 향후 정기점검(우기철, 추석대비 등)을 통해 손상의 진행정도를

분석 후 단위공사 또는 일상유지보수공사 등 보수 예정임.

○ 청계천복개(우안)

- 2순위 우선순위 중 2공구 내 상부 슬래브 하면과 벽체 박리박락, 철근노출부를

금년 예산 범위 내에서 우선 보수를 실시하고(총 보수물량 2,921㎡ 중 905㎡),

- 2순위 중 금년 미보수분(총 보수물량 2,921㎡ 중 2,016㎡) 및 3순위는

금년 하반기 예산 편성 요청하여 2021년 보수 예정이며, 향후 정기점검

(우기철, 추석대비 등)을 통해 손상의 진행정도를 분석하여 긴급보수가 필요하다고

판단될 경우 금년 일상유지보수공사로 보수 예정임

○ 충정교

- 2순위 및 3순위 보수대상은 금년 하반기 예산 편성 요청하여 2021년 보수 예정임

(2020년 예산 편성 요청하였으나 배정되지 않음)

붙 임 : 각 시설물별 보수보강 방안 1부.  끝.