문서번호	시설과-148
결재일자	2020.4.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설관리부장
박상권		송병욱	04/02 신용철
협조

「수유6배수지 건설공사」

조달자재(경계휀스) 수량변경 보고

2020. 4.

시설관리부

시 설 과

수유6배수지 건설공사」

조달자재(경계휀스) 수량변경 보고

수유6배수지 상부에 설치예정인 경계휀스(조달구매) 추가 설치가 필요하여 수량변경에 대한 검토 내용을  보고 드림.

사업개요

❍ 규    모 : 배수지 확충 3,100㎥(기존 3,000 ㎥⇒ 6,100㎥)

송배수관부설 500~600㎜, 연장 990m

❍ 기    간 : ’17. 12. 13.~’20. 5. 30.

❍ 도 급 비 : 2,858백만 원

❍ 시 공 사 : 영동건설㈜ 외 1개사

❍ CM 사 : ㈜한국종합기술 외 1개사

보고내용(건설사업관리자)

❍ 관련공문 : 낙산및수유6배수(감리) 제20-51호(’20. 3.24.)

- 수유6배수지 경계휀스 수량 변경 실정보고 제출

❍ 경계휀스 도면

수유6배수지 경계휀스 설치 관련도면

❍ 현황 사진

메쉬헨스 신규설치 구간(연립주택 뒤쪽)	재용예정인 메쉬휀스 출입문

❍ 현황 및 조치방안

구분	현황(당초)	조치방안(변경)
경계휀스	· ① 위치(연립주택 뒤쪽)에서 수도부지 경계용 메탈휀스와 설치예정인 메쉬휀스 사이가 연결되어 있지 않아 메쉬휀스 추가 설치 필요(10m) · ②위치(배트민턴장 위쪽)에 경계휀스 설치 누락(24m) · ③당초설계에는 출입문이 2개소로 설계되어 있으나 기존 배드민턴장에서 철거된 경계휀스 출입문을 재용이 가능함	· ① 위치(연립주택 뒤쪽) 미연결된 경계휀스 추가 설치(5경간, 10m) · ②위치는 배트민턴 이용시민과 배수지 분리를 위해 경계휀스 추가 설치(12경간, 24m) · ③당초설계에는 출입문이 2개소로 설계되어 있으나, 1개소만 설치 - 기존 철거 출입구 재용

❍ 공사비 대비표

공종명	규 격	단위	당 초		변 경		증 · 감
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
관급자재 및 관급설치비				22,315,850		24,485,850		2,170,000
메쉬휀스 (현장설치도)	W2000 × H2000	경간	136	21,216,000	153	23,868,000	17	2,652,000
경계휀스출입문 (현장설치도)	W2000 × H2000	개소	2	980,000	1	490,000	-1	-490,000
조달수수료	0.54%			119,850		127,850		8,000

건설사업관리자 종합의견

❍ 수유6배수지 건설공사 시공사에서 제출한 실정보고서 검토결과, 당초 설계된경계휀스(136경간, 172m) 물량 외 배드민턴장 분리 물량(12경간, 24m) 및 연립주택 분리에 필요한 물량(5경간, 10m)등, 총 17경간(34m)의 경계휀스 설치가 필요한 실정이며, 배드민턴장 철거 경계휀스 출입문 1개소는 재용이 가능하여 경계휀스 출입문 물량은 2개소에서 1개소로 조정코자 함

검토의견(공사관리관)

❍ 본부에서 발주, 건설중인 수유6배수지는 보안이 필요한 수도공급시설로   당초 136경간의 경계휀스로 조달구매 예정이었으나 검토 결과, 배수지 상부배드민턴장 이용 시민과의 분리에 12경간(24m), 배수지 인근 연립주택 분리에 5경간(10m) 등, 총 17경간의 경계휀스 추가 구매가 필요함

- 조달자재(경계휀스) 예산 증액 : 2,170천원

❍ 건설사업관리자 실정보고를 승인 조치하고 추후, 설계변경 등 후속 절차 이행

붙임 : 건설사업관리자 실정보고 1부.  끝.