투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역 설계변경(총차6회, 3차4회) 계약 의뢰

『중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역』에 대하여 아래와 같이 변경계약(총차6회, 3차4회)을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역

나. 계약금액 : 3,029백만원 (3차 계약금액 : 1,629백만원)

다. 용역기간 : ’17. 6. 19. ~ ’21. 1. 31. (3차 용역기간 ’19. 6. 4. ~ ’21. 1. 31.)

라. 용 역 사 : ㈜천일 외 3개사

마. 예산과목 : (공기업하수도사업특별회계) 물순환안전관, 물재생시설과, 자본적지출, 비가동설비자산취득, 건설중인자산, 시설비 및 부대비, 감리비, 물재생시설개선, 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치

바. 설계변경 내역

구 분		당 초	변 경	비 고
용역 금액	총차	3,029,000,000원	3,427,000,000원	증 398,000,000원
	3차	1,629,110,000원	2,027,110,000원
용역 기간	총차	2017.6.19. ~ 2021.1.31.	2017.6.19. ~ 2021.4.30.	증 89일
	3차	2019.6.4. ~ 2021.1.31.	2019.6.4. ~ 2021.4.30.

붙임  1. 방침서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	방재시설부장
★주무관	유시혁		환경시설과장	오열상		방재시설부장	04/01 박홍봉
협조자	재무예산과장	홍은미
시행	방재시설부-4862	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5,7)