코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기의뢰(서울특별시 2040 하수도정비기본계획 용역)

우리시에서 시행 중인 “서울특별시 2040 하수도정비기본계획 용역”에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명 : 서울특별시 2040 하수도정비기본계획 용역 - 장기계속 1차

2. 계약상대자 : ㈜한국종합기술 외 4개사 컨소시움

3. 준공기한 연기 내역

구 분		기 존	변 경	비 고
기간	총차	‘20.01.09 ~‘22.01.07	‘20.01.09 ~‘22.03.07
	1차	‘20.01.09 ~‘20.04.07	‘20.01.09 ~‘20.06.07

4. 용 역 비 : 변경없음

5. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 가. 준공기한 연기보고서 1부.

나. 준공기한 연기의뢰서 1부.

다. 합의각서(기간연장) 1부. 끝.

	물재생계획과장
주무관	김병오		하수계획팀장	정한영		물재생계획과장	04/01 이임섭
협조자	계약1팀장	조현
시행	물재생계획과-5182	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/
전화	2133-3786	/전송		/		/	대시민공개