투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설물(신호, 표지) 원인자부담공사 공사기간 연장승인 통보(신정1-1 재정비촉진사업)

1. 귀 사(기관)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련근거

가. 교통관리과-31936(2019.12.20.)호

나. 1-1지구 주택재개발 제2020-167(2020.03.27.)호

다. 대영전기감 GE20C-04-07(2020.04.01.)호

라. 동원.감 제2020-17(2020.04.02.)호

3. 위 호와 관련된 교통안전시설 원인자부담공사에 대하여 아래와 같이 공사기간 연장 승인     함을 통보합니다.

가. 공 사 명 : 신정1 재정비촉진구역 1-1지구 재정비촉진사업 중 교통안전시설물 설치 공사

나. 공사장소 : 양천구 신정1-1 주택재개발지구 일원

다. 공사내용 : 교통신호기 신·이설 및 교통안전표지 개선

라. 원 인 자 : 신정1재정비촉진구역1-1지구재정비촉진사업조합

마. 연장사유 : 선행공정인 토목공사 일정 지연으로 인한 공사기간 연장

바. 공사기간 연장승인 내용

구 분	승 인 전	승 인 후	비 고
공사기간	2020.03.16. ~ 2020.03.31.	2020.03.16. ~ 2020.06.30.	91일 증

붙임 : 공사기간 연장요청(감리사 검토의견서 2부 포함) 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	신정1재정비촉진구역1-1지구재정비촉진정비사업조합 조합장,대영유비텍(주) 대표,동림티엔에스(주) 대표,서울특별시지방경찰청장(교통관리과장),서울양천경찰서장(교통과장),서울특별시장(교통운영과장)
주무관	이성도		기전과장	전결 04/02 서승완
협조자
시행	기전과-3244	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237(마곡동67-1)	/
전화	02-2657-7963	/전송	02-2657-7939	/	lsd2000@seoul.go.kr	/	대시민공개