문서번호	도시철도토목부-3855
결재일자	2020.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	토목3과장	도시철도토목부장
엄태용	임병길	04/03 정대현

『진접선(4호선연장) 차량기지 건설사업 1공구 건설공사』

휴일 작업계획계획 승인 검토 [’20년 4월]

2020. 4.

도시기반시설본부

도시철도토목부

『진접선(4호선연장) 차량기지 건설사업 1공구 건설공사』

휴일 작업계획계획 승인 검토 [’20년 4월]

『진접선(4호선연장) 차량기지 건설사업 1공구 건설공사』 관련 ’20년 4월 휴일 작업계획 승인 요청에 대하여 보고 드림

□ 휴일 작업계획

○ 근거 : 동명감 진접1 제2020-086호 (2020.03.31.)

○ 근무 사유

- 작업의 연속성 확보와 원활한 공정추진을 위해 휴일에도 지속적 공사추진으로 공정 만회

○ 근무계획

- 휴무일(토요일) : 4일 [4/4(토), 4/11(토), 4/18(토), 4/25(토)]

→ 대체휴무 실시

- 휴  일(공휴일) : 5일 [4/5(일), 4/12(일), 4/19(일), 4/26(일), 4/30(석가탄신일)]

→ 시공사 귀책으로 시공사에서 대가 지급

○ 세부내용

작업일	작업위치	작업내용	관리자
			관리단	시공사
04월04일(토)	- 작업구1 (환기구#1)	- 수직구 6단 가시설작업 수직구 토류벽 철근 가공 및 조립	최광준 상무 [4월 6일 대체휴무]	[05명] 이육규 차장 도화영 대리 최병준 대리 임상욱 대리 박진용 대리
	- 작업구2 (환기구#2)	갱구앞 진입로 및 임대부지 벌개제근
04월05일(일)	- 작업구1 (환기구#1)	- 수직구 6단 가시설작업 수직구 토류벽 철근 가공 및 조립	장성일 이사	[04명] 김승태 대리 박순민 대리 박진용 대리 양원호 기사
	- 작업구2 (환기구#2)	임대부지 배수로 정비
04월11일(토)	- 작업구1 (환기구#1)	- 수직구 7단 가시설작업 수직구 토류벽 철근 가공 및 조립	권일순 부사장 [4월 10일 대체휴무]	[04명] 심준수 차장 구현우 과장 김승태 대리 양원호 기사
	- 작업구2 (환기구#2)	갱구부 벌개 제근

작업일	작업위치	작업내용	관리자
			관리단	시공사
04월12일(일)	- 작업구1 (환기구#1)	- 수직구 7단 가시설작업 수직구 토류벽 철근 가공 및 조립	최광준 상무	[04명] 김승태 대리 박순민 대리 이충헌 실장 양원호 기사
	- 작업구2 (환기구#2)	갱구부 벌개 제근
04월18일(토)	- 작업구1 (환기구#1)	- 수직구 천공 및 발파(암버럭반출)	권일순 부사장 [4월 17일 대체휴무]	[04명] 최성윤 과장 도화영 대리 임상욱 대리 윤수한 기사
	- 작업구2 (환기구#2)	갱구부 흙깎기 및 집토
04월19일(일)	- 작업구1 (환기구#1)	- 수직구 천공, 숏크리트 타설, 락볼트 설치	장성일 이사	[04명] 이육규 차장 최병준 대리 임상욱 대리 윤수한 기사
	- 작업구2 (환기구#2)	갱구부 흙깎기 및 집토
04월25일(토)	- 작업구1 (환기구#1)	- 수직구 천공 및 발파(암버럭반출)	최광준 상무 [4월 24일 대체휴무]	[04명] 심준수 차장 최성윤 과장 김승태 대리 이충헌 실장
	- 작업구2 (환기구#2)	갱구부 흙깎기 및 집토
04월26일(일)	- 작업구1 (환기구#1)	- 수직구 천공, 숏크리트 타설, 락볼트 설치	장성일 이사	[04명] 구현우 과장 최성윤 과장 최병준 대리 임상욱 대리
	- 작업구2 (환기구#2)	갱구부 흙깎기 및 집토
04월30일(목) 석가탄신일	- 작업구1 (환기구#1)	- 수직구 천공, 숏크리트 타설, 락볼트 설치	권일순 부사장	[05명] 이육규 차장 김승태 대리 도화영 대리 이충헌 실장 윤수한 기사
	- 작업구2 (환기구#2)	갱구부 흙깎기 및 집토

□ 검토결과

○ 휴일근무 검토결과 : 적정

	관 련 근 거
□ 과업내용서 6.3.2. (1) 휴일 및 야간근무 - 원인제공자(귀책사유)가 명백한 경우는 원인제공자가 부담하는 것을 원칙으로 한다. □ 휴일작업 현장관리 개선방안 검토보고(토시철도토목부-10681, ’13.11.14.) - 휴일근무 대가는 귀책사유에 따라 지급 → 시공사 귀책은 시공사에서 대가지급

○ 개정된 근로기준법에 따른 주간 적정 근로시간(52시간) 준수 : 적정

□ 조치계획

○ 작업의 연속성과 원활한 공정추진을 위하여 아래와 같이 휴일 작업 승인조건을 부여하고 건설사업관리기술자 근무계획을 승인코자 함.

	승인조건
□ 휴일작업에 소요되는 건설사업관리기술자 대가는 시공사에서 부담 □ 공종별 안전관리 담당자를 지정하여 안전관리에 만전을 기할 것 □ 휴일작업 시행전 세부 작업계획을 수립하고 공사관리의 공백이 없도록 공사 관리자는 작업장에 상주 정위치에서 근무하도록 감독할 것 □ 근로자 안전 10계명, 안전시공 10대 항목 준수 철저 □ 코로나19 예방 및 확산 방지를 위한 현장 안전관리 철저 ※ 코로나19 예방 및 확산 방지를 위한 사업장 대응지침 이행

붙임 : 휴일 작업계획 승인 요청 공문 1부.