투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	신림선 경전철 민간투자사업 공기연장 요청 관련 업무협의

1. 남서울2020-270호(2020. 4. 2.) 및 도시철도계획부-3248호(2020. 4. 7.)와 관련입니다.

2. 신림선경전철 민간투자사업 관련 남서울경전철(주)로부터 철도종합시험운행 시행지침 개정 관련 공기연장 협의 요청이 있어 아래와 같이 협의하오니 검토 후 2020. 4. 30.까지 의견을  제출하여 주실 것을 요청합니다.

가. 협의개요

1) 법령 등의 제·개정에 의한 총사업비 변경 : 증) 68.6억원

2) 총사업비 변경에 따른 공사기간 연장

가) 공기연장 : 5개월(당초 ’17. 2. ~ ’22. 2. ⇒ 변경 ’17. 2. ~ ’22. 7.)

나) 연장사유 : 시설물검증시험 착수지연, 종합시운전 기간 증가

나. 검토부서 및 내용

1) 공사기간 연장 검토

가) 검토부서 : 도시철도설비부(도시철도사업부 협조)

나) 검토내용 : 실시협약 제21조 (공사기간) 제②항 공사기간 연장 적정성

2) 총사업비 변경 검토

가) 검토부서 : 도시철도설비부(관련부서 협조)

나) 검토내용 : 실시협약 제13조 (총사업비의 변경) 제①항 제3호 적용 적정성

붙임 1. 총사업비 및 공사기간 연장 협의 요청 계획 1부.

2. 사업시행자 공기연장 협의요청 공문 1부.  끝.

	도시철도계획부장
수신자	도시철도사업부장,도시철도설비부장
주무관	이전근		경전철관리과장	안규홍		도시철도계획부장	04/07 김용학
협조자	주무관	김태윤
시행	도시철도계획부-3282	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 10층	/
전화	02-772-7156	/전송	02-772-7304	/	ljk70@seoul.go.kr	/	부분공개(7)