문서번호	시설관리과-8504
결재일자	2020.4.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	시설안전팀장	시설관리과장		동부수도사업소장
강무진	김대용	천성훈		04/07 이재호
협 조
	급수운영과장		송근호
	급수관리팀장		권기섭

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

2020년 노후밸브 정비 계획

2020. 4

동부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2020년 노후밸브 정비계획

상수도 밸브의 내구성 향상 및 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급하기 위한 2020년 노후밸브 정비 추진계획을 보고 드림.

Ⅰ		사업현황

□ 관련근거

❍ 2020년 시설물 유지관리 사업 추진계획: 시설과-159(2020.1.6.)호

❍ 2020년 노후밸브 정비 추진계획: 시설과-3912(2020.3.31.)호

□ 노후밸브 사업 현황(본부)

❍ 사업내용: 고장 또는 녹물발생 우려가 있는 ’94년 이전 회주철 밸브 정비

❍ 사업대상: 76,766개소(비내식성 회주철 밸브, ’08년 기준)

❍ 사 업 비: 504,030백만원(사업기간: ’08~’27년)

❍ 연차별 투자규모

(단위: 개소, 백만원)

구 분	총 계	기투자(~’19년)			추진계획
		소계	~’18년	’19년	소 계	’20년	’21년~
정비수량	76,766	53,663	50,433	3,230	23,133	2,685	20,448
사업비	504,030	225,980	198,500	27,480	278,050	22,480	255,570

Ⅱ		추진계획

□ 2020년 노후밸브 정비계획(사업소)

❍ 예산별 정비 목표

	노후밸브 정비사업	소화전용 노후밸브 정비사업
예산과목	자본적지출,유형자산취득,구축물, 시설비및부대비,시설비(노후밸브 정비)	소방용수시설 등의 설치 및 관리, 소방용수시설 설치 및 보수, 시설비
정비목표	435 개소	203개소
정비예산	3,480,000천원	606,000천원

□ 추진 내용

❍ 안심 서울(마을) 조성, BSC 성과관리 대상사업으로 사업소 목표관리 ⇒ 사업소 경영실적평가에 반영, 분기별 목표관리(붙임1)

(단위 : 개소)

구 분	계	1분기	2분기	3분기	4분기
총 계	435	33	76	152	174

❍ 소ㆍ중블록 단위의 노후밸브 일제 정비

- 재개발ㆍ재건축 지역은 제외

- 노후 상수도관(송배수관, 배급수관) 정비 대상구간은 해당사업으로 정비

❍ 대구경 노후밸브 우선 정비

- 대규모 단수로 인한 민원 예상 지역은 부단수공법(라인스토핑)을 활용

- 단가계약사업 계약 시 부단수공종 반영(필요시 단위사업 발주)

※ 사업소별 450㎜ 이상 노후밸브 현황

(단위: 개소, 2020. 3. 현재)

사업소	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
대상	985	121	78	123	35	143	140	229	116

❍ 본부 시행 ‘대형 제수밸브 점검용역’ 결과 지적사항은 우선 정비

- 용역명: 대형 제수밸브 점검정비(강북지역) 용역

- 점검결과

▸ 지적사항: 녹발생 심함(12개소) 등 총 115개소 정비

▸ 소요예산: 113,600천원(밸브 3,400, 밸브실 110,200)

❍ 소구경 노후밸브  교체 시 가급적 매몰형 중형밸브실 설치

❍ 소방재난본부 관리대상 소화전용 노후밸브 정비 방향

- 노후 상수도관(송배수관, 배급수관) 정비, 소블록 배급수관망 개선, 단가계약(시설물 설치및보수, 급수공사) 사업에 반영하여 정비

- 지하식 소화전 밸브실은 적벽돌쌓기가 생략된 ‘소화전실(축소형) 설치

- ‘소화전 신설ㆍ보수 사업’ 예산과 구분되므로 분리 집행

Ⅲ		행정사항

❍ ‘노후밸브 정비’ 실적 월보 제출: 시설관리과(익월 5일까지)

- 사업소 분기별 목표수량을 고려하여 정비 시행

❍ ‘소화전용 노후밸브’ 정비 실적 제출: 시설관리과(분기별)

- 전분기 실적을 다음분기 시작 월 5일까지 제출

붙임 1. ’20년 노후밸브 정비 사업소별ㆍ분기별 목표관리 현황 1부.

2. ’20년 노후밸브 정비 실적 제출양식(월보) 1부.

3. ’20년 소화전용 노후밸브 정비 실적 제출양식(분기) 1부.  끝.